투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	별내선(8호선연장) 건설공사 올림픽로 공사중 교통소통대책 변경 승인 협조요청

1. 교통운영과-23007호(2017.11.29.) 및 교통운영과-11634호(2018.7.13.)와 관련입니다.

2. 올림픽로 공사 중 소음 해소를 요청하는 민원이 지속적으로 발생하고 있어, 향후 민원 해결을 위해 교통소통대책을 다음과 같이 변경하여 시행하고자 승인을 요청하오니, 검토후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

나. 공사기간 : 2017.8.23.~2023.8.21.

다. 변경내용

구 분	당 초	변 경	사 유
54단계	□공사기간(21개월) ‘20.4.1.∼’21.12.31. □작업구 및 점용위치 붙임2 도면 참조 - 4차로 확보 변경없음	□공사기간(24개월) ‘20.1.15.∼’21.12.31. □작업구 및 점용위치 붙임2 도면 참조 - 4차로 확보 변경없음	당초 계획된 작업구 구간이 **********에 근접하여 향후 소음 민원 해소를 위해 위치 변경 필요 ※ *******************************

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 교통소통대책(54단계) 변경 관련도면(당초, 변경) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박중모		동북선1과장	김용선		도시철도사업부장	12/04 최병훈
협조자	주무관	박노성
시행	도시철도사업부-12129	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	772-7151	/전송	772-7305	/	p05480548@seoul.go.kr	/	부분공개(5)