문서번호	생태환경과-3263
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김화시		최병언	12/04 김인숙
협 조

『2019년 광나루 자전거도로변 이용숲 조성사업』설계변경 시행

2019. 12.

한강사업본부

생태환경과

『2019년 광나루 자전거도로변 이용숲 조성사업』설계변경 시행

울창한 한강변 숲 조성을 위해 시행중인「2019년 광나루 자전거 도로변 이용숲 조성사업」에 대하여 현장여건에 따른 변경사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 2019년 광나루 자전거도로변 이용숲 조성사업

○ 위    치 : 광나루한강공원(올림픽대교~구리암사대교 부근)

○ 공사기간 : 2019. 9. 09 ~ 12. 07

○ 공사내용

- 수목식재 : 소나무 등 26종 36,559주

- 초화식재 : 홍띠 등 9종 8,726본, 잔디 3,500㎡

○ 도 급 비 : 금1,156,136,700원

○ 도 급 자 : 하송이엔씨㈜ 대표 장소미, 호연건설(주) 대표 조미경

▢ 주요변경 내용

○ 소나무 식재지 및 구리암사대교 주변 경관향상을 위한 수목 추가

○ 자전거도로 이설계획으로 인한 식재위치 및 물량 조정

○ 암사생태공원 주변 식생복원 및 경관향상을 위한 수목 추가식재

○ 시민 이용도를 고려하여 쉼터 수량 조정

○ 위해식물 확산방지, 경관향상을 위한 잔디물량 추가

○ 현장 여건을 감안하여 소나무 식재지 마운딩 물량 감

▢ 설계변경 내용

구 분	변경사유 및 변경요청	비 고
식재 공사	○ 소나무 식재지 및 교각하부 자전거도로변의 녹지경관 향상을 위해 수종 조정 및 수량 증가
	- 소나무(H6.0×W3.0×R30): 9주 → 12주 - 소나무(H5.0×W2.5×R20): 13주 →16주 - 배롱나무(H2.5×R8) : 0 → 7주 - 왕벗나무(H4.0×B10) : 0 → 35주 - 대왕참나무(H4.5×R20) : 0 → 35주 - 수크령(식물매트) : 0 → 60㎡ - 억새(식물매트) : 0 → 60㎡ - 황금사철(H0.6×W0.2) : 0 → 5,000주 - 왜성수크렁(8CM) : 0 → 2,450본 - 삼색조팝(10CM) : 0 → 2,776본 - 모닝라이트(15CM) : 0 → 300본 - 사초(에버골드)(10.2CM) : 0 → 2,000본 - 은사초(10CM) : 0 → 500본 - 홍띠(10.2CM) : 0 → 500본 - 보리사초(8CM) : 0 → 200본 - 구절초(8CM) : 1,760본 → 0 - 기린초(8CM) : 1,500본 → 0 - 매발톱꽃(10CM) : 1,980본 → 0 - 수목 식재지 복토(H150) : 10㎥ → 100㎥
	○ 위해식물로 훼손된 지역에 관목을 추가 식재하여 하천식생 복원 및 경관 향상
	- 화살나무(H0.8×W0.4) : 300주 → 3,200주 - 개쉬땅나무(H1.0×W0.3) : 2,790주 → 4,000주 - 덜꿩나무(H1.0×W0.4) :1,310주 → 4,000주 - 좀작살(H1.2×W0.4) :1,650주 → 5,500주 - 조팝나무(H0.8×W0.4) : 4,370주 → 7,000주 - 부들레아(다비디로얄레드) D15 : 1,360주 → 2,500주 - 부들레아(다비디블랙나이트) D15 : 2,290주 → 3,000주 - 부들레아(화이트프로퓨전) D15 : 590주 → 1,000주
	○ 수급여건, 식재위치 등을 고려한 계획변경으로 식재수목 조정
	- 양버들(H7.0×R20) : 30주 → 15주 - 양버들(H4.0×R12) : 264주 → 0 - 이팝나무(H3.5×R12) : 156주 → 247주 - 이팝나무(H4.0×R15): 249주 → 259주
식재 및 시설물 공사	○ 설계서와 상이한 곳은 현장여건에 맞게 식재위치 및 수량 조정
	- 팽나무(H7.0×R35) : 2주 → 0 - 팽나무(H5.0×R25) : 6주 → 0 - 방근시트 깔기 : 952㎡ → 0 ※ 이팝나무 등 일부수종 식재위치 조정
	○ 가시박 등 위해식물 확산예방 및 녹지경관 향상을 위해 식재지 하부와 경계부에 잔디마감
	- 잔디(평떼, 0.3×0.3) : 160.56㎡ → 3,500㎡

구 분	변경사유 및 변경요청	비 고
식재 및 시설물 공사	○ 시민 이용도 등 현황에 맞게 대왕참나무(조형) 및 바닥포장 수량 조정
	- 대왕참나무(조형) 식재지 : 5개소 → 3개소 ㆍ대왕참나무(조형) : 30주 → 18주 ㆍ자전거보관대 : 20개소 → 10개소(관급자 설치) ㆍ투수블럭포장(T60): 170.8㎡ → 128.1㎡ ㆍ녹지경계석(직선) : 172.4m → 152m
	○ 식재예정 위치에 일부 분포한 생육불량 및 고사목 등 제거
	- B8 이하 : 0 → 2주, - B10 : 0 → 9주 - B12 : 0 → 8주, - B14 : 0 → 8주 - B16 : 0 → 5주, - B18 : 0 → 6주 - B22 : 0 → 3주, - B24 : 0 → 3주
부대 공사	○ 수목 식재 시 발생한 잔토는 현장 내 처리
	- 상차(토사) : 203.878㎥ → 0 - 잔토(토사) : 203.878㎥ → 0
	○ 현황 레벨을 고려하여 소나무 식재지의 마운딩 제외
	- 마운딩(H300) : 17.88㎥ → 0
	○ 변경된 내용에 따라 수량 조정
	- 삼발이지주목(L1800) : 988조 → 828조 - 통기관 설치(H350) : 2,082개소 → 1,932개소
관급 자재	○ 변경된 내용에 따라 관급자재 수량 조정
	- 자전거보관대 : 20개소 → 10개소(관급자 설치) - 수크령(식물매트) : 0 → 240장 - 억새(식물매트) : 0 → 240장 - 통기관 설치(h350) : 2,082개소 → 1,932개소 - 인조화강석블럭(T60) : 179.34㎡ → 134.5㎡ - 평의자 : 20개소 → 16개소(관급자 설치)

▢ 설계변경 금액

○ ┏ 당   초 : ***************

***********************************************

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		*************	*************	*************
도급액	공급가액	*************	*************	*************
	부가가치세	***********	***********	************
	계	*************	*************	*************
관 급 액		**********	**********	***********

▢ 예산활용 계획

○ 본공사 낙찰차액 및 예산잔액 등******** 활용

(단위 : 백만원)

***** ***	**** ***	**** ***	**** *****	**** *****	비 고
*****	*****	*****	**	***

○ 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 한강숲 조성, 시설비(100-401-01)

▢ 조치계획

○ 위와 같이 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계변경도서 1부.  끝.