문서번호	기반시설과-4024
결재일자	2019.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		代정창수	12/04 전영주
협조

『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』

공사 설계변경 (전체2회, 1차2회, 2차1회)시행 보고

2019.  12.

한강사업본부

(시  설  부)

『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』

공사 설계변경(전체2회, 1차2회, 2차1회) 시행 보고

『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』와 관련 실정보고되어 승인한 물량 및 도급비 변경내용 등을 설계변경 처리하여 공사에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)

❍ 공사규모 : 승강기 및 비상계단 설치(가양대교 남단, 올림픽대교 남단)

❍ 총사업비 : 2,765백만원(토목공사비 2,374백만원, 이전비 391백만원)

❍ 계약금액 및 공사기간

(단위:천원)

구 분	총 차	1 차	2 차	비 고
계약금액	1,831,862	1.588,334	243,528
계약기간	‘18.12.26 ~‘19.12.25	‘18.12.26 ~‘19.09.30	- ~‘19.12.25

❍ 시 공 사 : 주계약자 ⇨ 이화종합건설㈜ / 부계약자 ⇨ ㈜신영토건

□ 설계변경 사유

❍ 변경근거 : 가양 2019-0705(2019.07.15.)

- 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속) 설계변경 요청

❍ 관련방침

- ‘19.10.28 : 기반시설과-3519, 포장 계획 변경 등

- ‘19.11.05 : 기반시설과-3653, 계단부 판석 및 배수시설 설치

- ‘19.11.22 : 기반시설과-3917, 쏠라 LED 표지판 설치

❍ 전체분 공사비(도급비)증감내용

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	2,390,232,000	2,383,258,000	6,974,000
도급공사비	2,303,257,000	2,309,294,000	6,037,000
공급가액	2,093,870,000	2,099,358,183	5,488,183
부가가치세	209,387,000	209,935,818	548,818
관급자재비	86,975,000	65,324,000	21,651,000
폐기물처리비		8,640,000	8,640,000

❍ 전체분 제2회 주요 변경내용(도급비 : 증 6,037천원)

(단위:천원)

구 분	실 정 보 고			제 1 회 설 계 변 경			증·감
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
포장계획변경	6,443	70,253	63,810	6,443	70,253	63,810	-
계단부판석포장		7,649	7,649		7,649	7,649	-
배수시설		2,253	2,253		2,253	2,253	-
쏠라LED표지판		14,007	14,007		14,007	14,007	-
기타	1,481,736	1,463,362	18,374	1,481,736	1,463,362	18,374
제경비 증감	815,078	751,770	63,308	815,078	751,770	63,308	63,308
도급공사비	2,303,257	2,309,294	6,037	2,303,257	2,309,294	6,037	6,037
관급자재비	86,975	65,324	21,651	86,975	65,324	21,651	21,651
폐기물		8,640	8,640		8,640	8,640	8,640
총사업비	2,390,232	2,383,258	6,974	2,390,232	2,383,258	6,974	6,974

※ 관급자재비 증액사유 : 성수대교 남단, 천호대교 북단 공사 중지로 인한 레미콘,                               철근, 화강석, 탄성포장 감액

❍ 1차분 2회 계약금액 변경(도급비:감14,499천원)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증· 감
직접공사비	1,237,386,036	1,230,250,047	7,135,989
제 경 비	212,454,964	206,409,953	6,045,011
공급 가액	1,449,841,000	1,436,660,000	13,181,000
부가가치세	144,984,100	143,666,000	1,318,100
도급공사비	1,594,825,100	1,580,326,000	14,499,100
관급자재비	86,975,000	65,324,000	21,651,000
폐기물처리비		8,640,000	8,640,000

❍ 2차분 1회 계약금액 변경(도급비:증20,536천원)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증· 감
직접공사비	469,032,911	493,063,607	24,030,696
제 경 비	174,996,089	169,634,575	5,361,514
공급 가액	644,029,000	662,698,182	18,669,182
부가가치세	64,402,900	66,269,818	1,866,918
도급공사비	708,431,900	728,968,000	20,536,100
관급자재비
폐기물처리비

□ 조치의견

❍ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하여 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)의 품질·안전 관리를 철저히 하고 계획된 공정에 따라 공사 완료코자함.

붙  임 : 1) 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속) 설계변경 요청 1부.

2) 설계변경 수량 및 공사비 증감 현황 1부.  끝.