문서번호	조경과-17324
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
윤석채		석승우	12/04 문길동
협 조

- 물을 이용한 친수공간 조성사업 -

공사비 추가 지원 검토보고(강동구)

2019. 12.

푸른도시국

조경과

- 물을 이용한 친수공간 조성사업 -

공사비 추가 지원 검토보고(강동구)

강동구 451-3번지 일대 ‘물을 이용한 친수공간 조성사업’ 관련 설계변경에 따른 공사비 추가 지원 요청에 대하여 검토하고 아래와 같이 결과 보고 드림.

- 강동구 푸른도시과-24713호(2019.12.4.) -

□ 사업개요

○ 위    치 : 강동구 성내동 451-3번지 일대 (상징가로공원 내 수경시설)

○ 규    모 : 5,362㎡

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

○ 사업내용 : 노후 분수시설 정비 및 휴게공간 조성 등

○ 총사업비 : 350백만원 (설계비 11, 공사비 339)

□ 검토결과

○ 현장여건 반영에 따른 물량증가 등으로 공사비 증액 : 35,685천원

(단위:천원)

증액분	주요 설계변경 사유	검토결과
35,685	․현장여건 반영에 따른 수경시설 정비 및 수목식재 등 물량 증가	’19년 본예산 지원

○ 설계변경에 따른 증액분 공사비를 강동구에 재배정하여 연내 공사가 원활히 준공될 수 있도록 신속히 지급

□ 조치계획

○「물을 이용한 친수공간 조성사업」예산을 활용 강동구 지원

(단위:천원)

예산현액	기 재배정액	재배정 잔액	금회 지원액	비 고
350,000	313,479	36,521	35,685	시설비

○ 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충,

물을 이용한 친수공간 조성, 시설비및부대비, 시설비

붙임  공문 등 관련 자료(강동구) 각1부.  끝.