투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	하도급 계약 변경 알림(강남순환 4공구)

1. 서영강남 19-302, 303, 304, 305(2019. 12. 2.) 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로 4공구 건설공사』관련하여 하도급 계약 변경 통보되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 하도급 계약 변경 현황

하도급사	공 종	공 사 비				공사기간
		구분	원도급액	하도급액	비율 (%)
***** ******	도로표지판 설치공사	당초	1,985,500,000	1,717,100,000	86.48	2016. 4. 27.~ 2019. 11. 30.
		변경	2,041,600,000	1,768,800,000	86.64	2016. 4. 27.~ 2020. 5. 31.
***** ******	포장공사	당초	652,740,000	704,000,000	107.85	2016. 4. 17.~ 2019. 11. 30.
		변경	701,690,000	733,700,000	104.56	2016. 4. 17.~ 2020. 5. 31.
******* ******	금하지하차도 교차로 STS공사	당초	5,290,800,000	4,584,360,000	86.65	2017. 8. 29.~ 2019. 11. 30.
		변경	5,163,000,000	4,492,400,000	87.01	2017. 8. 29.~ 2019. 11. 30.
***** ******	금하, 박미지하차도 공사	당초	26,394,500,000	21,810,800,000	82.63	2017. 5. 3.~ 2019. 11. 30.
		변경	27,754,100,000	23,127,280,000	83.33	2017. 5. 3.~ 2020. 5. 31.

붙임  하도급 변경계약 통보서 4부.  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	장수철		토목부장	12/04 김용제
협조자
시행	토목부-22367	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	부분공개(6)