투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 설계변경 계약 의뢰(2차분 1회)

우리 부에서 시행 중인 “신림공영차고지(저류조포함)건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역”에 대해 아래와 같이 설계변경(2차 1회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 신림공영차고지(저류지포함) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 용 역 비 : 2,048백만원(2차 : 164백만원)

3. 용역기간 : '18. 4. 2. ∼ '20. 8. 1.(2차 : '19. 7.27. ∼ '19.12.31.)

4. 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

5. 설계변경 현황(2차 1회)

(단위 : 원)

구 분	전체분		2차분(1회)		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경
용역비	*************	*************	***********	***********	********* ***************
용역기간	************ ***********	************ ***********	************ ***********	************ ***********	********* **********

- 변경사유 : 건설사업관리기술자 투입일정과 인원을 현장여건 등을 고려하여 조정

붙임 1. 설계변경 내역서(2차 1회) 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.

3. 감리단 검토의견서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	윤효진		터널건설과장	여용석		토목부장	12/04 김용제
협조자	주무관	이상근
시행	토목부-22416	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2568	/전송	02-3708-2599	/	yhj7004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)