문서번호	도로보수과-11743
결재일자	2019.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
주영진		류태용	12/04 代박종윤
협조

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제4차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12

강서도로사업소

(도로보수과)

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제4차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2019. 3. 14. ~ 2019. 12. 31.

○ 시공업체 : ㈜ 렉스  대표 전현신

○ 도 급 비 : 640,762,640원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제4차)

○ 작업위치 : 양천구 목동로 170앞 차로재구획 노면표시 재도색 등 46개소

○ 작업기간 : 2019. 10. 10. ~ 2019. 12. 20.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	257,375천원	203,223천원	감) 54,152천원
관 급 비	107,250천원	90,388천원	감) 16,862천원
총 공사비	364,625천원	293,611천원	감) 71,014천원

○ 작업내역 및 증감사유

연번	위 치	단 위	작업 지시 수량	작업 완료 수량	증,감	사유
1	양천구 목동로170 (진명여고) 앞	M	978	1,072	증)94	실작업량 증.감에 따른 물량변경
2	양천구 중앙로45길 42 (장수공원 앞)	M	748	1,628	증)880	실작업량 증.감에 따른 물량변경
3	양천로712~738(강서연세병원~나이아가라 호텔 앞)	M	900	880	감)20	실작업량 증.감에 따른 물량변경
4	구로구 오리로 1181(광덕교차로)	M	366	362	감)4	실작업량 증.감에 따른 물량변경
5	강서구 마곡동 726-9 (마곡힐스테이트아)주변	M	619	1,702	증)1,083	실작업량 증.감에 따른 물량변경
6	월정초교앞교차로~화곡터널입구교차로	M	5,623	7,504	증)1,881	실작업량 증.감에 따른 물량변경
7	강서구 나이아가라 호텔앞~신동아파트앞	M	1,261	2,010	증)749	실작업량 증.감에 따른 물량변경
8	강서구 화곡역~강서구청	M	15,485	14,889	감)596	실작업량 증.감에 따른 물량변경
9	과학수사연구원입구교차로~강월초교입구교차로	M	7,021	9,241	증)2,220	실작업량 증.감에 따른 물량변경
10	양천구 국민은행사거리~ 고강동철탑 전	M	6,097	6,083	감)14	실작업량 증.감에 따른 물량변경
11	목동아)13단지교차로~목동아)13단지 1325동 앞	M	3,064	2,870	감)194	실작업량 증.감에 따른 물량변경
12	양천구 목동역교차로	M	2,399	2,042	감)357	실작업량 증.감에 따른 물량변경
13	양천구 신월로월드오피스 앞~ 신정네거리역교차로	M	3,980	3,356	감)624	실작업량 증.감에 따른 물량변경
14	양천구 신정네거리교차로~ 남부지방법원	M	9,510	11,600	증)2,090	실작업량 증.감에 따른 물량변경
15	양천구 양천효병원~목동대성학원	M	7,214	5,959	감)1,255	실작업량 증.감에 따른 물량변경
16	화곡로입구교차로~서서울호수공원앞교차로	M	17,625	11,644	감)5,981	실작업량 증.감에 따른 물량변경
17	양천구 신정동 735-5	M	191	191	0
18	강서구 화곡동 907-5	M	273	273	0
19	영등포구 영등포동4가 150-1	M	134	134	0
20	영등포구 서울교진입부	M	618	618	0
21	영등포구 양평동3가 75-4 부근	M	51	51	0
22	양천구목동406-4 (목동현대프라자입구)	M	105	105	0
23	양천구신월동631-1 (지하차도위)	M	38	38	0
24	양천구 목동야구장입구	M	168	216	증)48	실작업량 증.감에 따른 물량변경
25	강서구염창동286 (안양천로)	M	83	83	0
26	양천구 오목로 231 (빽다방 앞), 2차로	M	-	101	증)101	긴급복구 작업추가
27	양천구 오목로 195 (SH수협은행 앞), 2차로	M	-	81	증)81	긴급복구 작업추가
28	양천구 오목로 130 (굽네치킨 앞), 2차로	M	-	82	증)82	긴급복구 작업추가
29	오목로(중앙로312~오목로191)	M	-	1,597	증)1,597	굴착복구 작업추가
30	양천구 신월동 510-1~507-3	M	967	965	감)2	실작업량 증.감에 따른 물량변경
31	강서구 등촌동 672-6	M	86	88	증)2	실작업량 증.감에 따른 물량변경
32	영등포구양평동1가 28-3~9-1	M	17	17	0
33	영등포구당산동4가 47~32-59	M	82	82	0
34	강서구 화곡동 1106-1	M	17	17	0
35	양천구신정동1095 (남부법원사거리)	M	3	3	0
36	양천구양평교하부 (열병합발전소교차로)	M	7	7	0
37	양천구 목동 406-28	M	201	206	증)5	실작업량 증.감에 따른 물량변경
38	영등포구 여의도동 3-9	M	462	462	0
39	구로구신도림동 437-1~434-6	M	561	561	0
40	영등포구의사당대로 (의사당역2번출구)	M	401	120	감)281	실작업량 증.감에 따른 물량변경
41	강서구 화곡동 1111-1	M	245	245	0
42	영등포구 양평동 1가 13-1 ~ 9-32	M	111	111	0
43	강서구 가양3~5단지교차로	M	-	456	증)456	작업추가
44	경인-마포대로(15개소)	M	2,448	2,844	증)396	실작업량 증.감에 따른 물량변경
45	공항대로(11개소)	M	2,568	2,424	감)144	실작업량 증.감에 따른 물량변경
46	영등포구 당산동6가 323-1(당산로 229 주변, 당산역하부 진입도로)	M	495	921	증)426	실작업량 증.감에 따른 물량변경
	합계	M	93,222	95,941

□ 검토 및 조치계획

○ 상기 사항과 같이 일부 현장여건 변경 등에 따라 물량변경이 발생하였으며, 작업완료에 대해서 추후 설계변경 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제4차 작업완료 내역서 1부.

2. 제4차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제4차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.