문서번호	생태환경과-3274
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김화시		최병언	12/05 김인숙
협조

- 2019년 반포 그늘숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2019. 12.

한강사업본부

생태환경과

- 2019년 반포 그늘숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

울창한 한강숲 조성을 위하여 시행중인「2019년 반포 그늘숲 조성사업」과 관련 서울시설공단의 공사현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독3처-12132(2019.12.3.) 공사현장 실정보고 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 반포 그늘숲 조성사업

○ 공사기간 : 2019. 09. 17. ~ 12. 15.

○ 주요내용 : 수목식재 및 생육환경 개선

∙수목식재 : 이팝나무 등 11종 21,755주

∙초화류 : 가우라 등 2종 28,155본

○ 도 급 비 : 금492,590,900원

○ 도 급 자 : 상림조경(주) 대표 서명현

▢ 실정보고 사항

구 분	변경사유 및 변경요청	승인여부
식재 공사	○ 공원 경관 향상을 위한 현장내 불량수목 및 고사목 제거 후 대체 식재 및 식재물량 조정	승인
	▸교목제거(B15) : 6주 → 19주 ▸교목제거(B12) : 14주 → 15주 ▸교목제거(B20) : 0 → 1주 ▸교목제거(B18) : 0 → 1주 ▸교목제거(B10) : 0 → 12주 ▸거향수(R10): 20주 → 40주 ▸참느릅나무(R12): 124 → 109주 ▸대왕참나무(R25): 30주 → 38주 ▸팽나무(R25): 20주 → 30주 ▸이팝나무(R15): 58주 → 108주 ▸이팝나무(R20): 0 → 8주 ▸화살나무(H0.6xW0.3) : 0 → 2,700주 ▸덜꿩나무(H1.0xW0.4) : 0 → 1,800주
구 분	변경사유 및 변경요청	승인여부
식재 및 부대공사	○ 현장내 답압으로 인한 잔디훼손구간 잔디식재 추가 및 초화류 식재수종 및 규격 변경	승인
	▸잔디(평떼) : 668㎡ → 2,769㎡ ▸가우라(15cm) : 14,500본 → 0 ▸코레우리(15cm) : 12,000본 → 0 ▸가우라(8cm) : 0 → 13,592본 ▸아스타(8cm) : 0 → 14,563본
	○ 반입토사에 대한 운반비 제외
	▸토사반입: 804㎥ → 0
	○ 교목 식재수량 증가에 따른 지주목 수량 변경
	▸삼발이지주목(대형): 30조 → 78조 ▸삼발이지주목(중형): 0 → 29조
	○ 반포한강공원 이용객의 안전을 위한가림막 휀스 설치 및 보행안전도우미 배치 필요
	▸가설울타리(H1,200xW2,000) : 0 → 100경간 ▸보행자도우미 : 0 → 48인
관급 자재	○ 현장 실정사항으로 인한 관급자재 물량 변경	승인
	▸가우라(15cm) : 14,500본 → 0 ▸코레우리(15cm) : 12,000본 → 0 ▸가우라(8cm) : 0 → 14,000본 ▸아스타(8cm) : 0 → 15,000본 ▸비료(20kg) : 5,671포 → 1,281포 ▸통기관 : 558EA → 708EA ▸잔디보호매트 : 0 → 410㎡ ▸옥외용벤치 : 0 → 4EA

▢ 계략 설계변경 금액 : **********

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	***********	***********	*************
	부가세	**********	**********	************
	도급비계	***********	***********	**************
관 급 액		***********	***********	************
총 공 사 비		***********	***********	*************

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선 시공후 추후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 공사현장 실정보고서 승인요청 공문 1부. 끝.