문서번호	시설과-5400
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
조경팀장		조경팀장	중부공원녹지사업소장
이종무		이종무	12/05 박미애
협조

- 남산 무장애 친화공원 조성공사 -

공사실정 검토보고

2019. 12.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

- 남산 무장애 친화공원 조성공사 -

공사실정 검토보고

우리 사업소에서 추진하고 있는 『남산 무장애 친화공원 조성공사』 와 관련하여

공사감독기관으로 부터 현장여건 변동 등에 따라 실정보고사항이 접수되어 검토후 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ

관 련 근 거

❍ 공사현장 실정보고 승인요청 : 서울시설공단 공사감독3처-12261(2019. 12. 04)호

Ⅱ

공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 남산 무장애 친화공원 조성공사

❍ 공사기간 : 2019. 09. 23. ~ 12. 15.

❍ 도 급 비 : 금353,354,900원(관급자재비 462,977,740원 별도)

❍ 도 급 자 : (주)티시스 대표 김기유, 제일토건(주) 대표 맹흥재

❍ 공사감독 : 서울시설공단 공사감독3처

❍ 현 공정율 : 약 92%

Ⅲ

실정보고사항 및 검토의견

❍ 실정보고사항 검토결과 : 붙임참조

❍ 발주청 추가 지시사항

- 한남자락 장애인전용 주차장과 공원관리차량 주차장 보강토옹벽 상단에          안전사고 에방을 위해 안전휀스 설치

- 세부 물량과 공법은 현장여건에 따라 조정 가능하며, 보험료 및 제경비를          정산하여 예산범위내 물량 조정하여 시행

Ⅳ

공사비 증감내역

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	321,231,727	404,016,000	82,784,273
	부가세	32,123,173	40,401,600	8,278,427
	도급비계	353,354,900	444,417,600	91,062,700
도급자관급		250,582,960	219,487,730	-31,095,230
관급자관급		212,394,780	210,622,650	-1,772,130
총 공 사 비		816,332,640	874,527,980	58,195,340

Ⅴ

검 토 의 견

❍ 상기와 같이 공사감독기관으로 부터 제출된 실정보고 내용에 대해 검토한 결과

현장여건 변동에 따른 사항으로 실정보고 사항을 승인처리하고, 향후 설계변경

(정산) 시행코자 함.

붙임 : 1. 실정사항 검토결과(발주처)

2. 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부

3. 실정보고 검토내용 1부

4. 개략공사비 내역서 1부.   끝.