문서번호	정수시설과-13176
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	12/05 代양영민
협조
	주무관		김희수

『1취수장 전염소 투입설비(인젝터) 전기공사』

공기연장 및 정산설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『1취수장 전염소 투입설비(인젝터) 전기공사』

공기연장 및 정산설계변경 검토 보고

1취수장 전염소 투입설비 개선을 위한 전기 공사 관련, 선행 공정(기계설비) 지연에 따른 공기연장 및 보험료 정산 설계변경 보고임

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 1취수장 전염소 투입설비(인젝터) 전기공사

○ 공사내용 : 가압수 펌프(30kW)×2대, 현장조작반(자동제어)×3면 등 전기 공사

○ 계약금액 : 금31,582,700원(금삼천일백오십팔만이천칠백원)

○ 공사기간 : 2019. 10. 10. ~ 2019. 12. 08.

○ 계 약 자 : 주식회사 신라전기 대표이사 임인식

○ 공 정 율 : 계획/실공정 100/90%(※기계설비공정율 95%)

2		설계 변경

○ 계약금액 조정 : 사후 정산대상 보험료 납부실적에 따른 금액조정(시공사 요청)

구 분	당 초	변 경	증․감
도 급 액	금31,582,700원	금30,423,680원	감)1,159,020원

※ 원가계산 세부 내용

비 목	금 액(원)		비 고
	당 초	변 경
국민건강보험료	147,551	0	감)147,551
노인장기요양보험료	12,556	0	감)12,556
연금보험료	827,374	0	감)827,374
소 계	987,481	0	감)987,481
일반관리비	811,882	782,258	감)29,624
이 윤	836,902	800,352	감)36,550
공 급 가 액	28,711,546	27,657,891	감)1,053,655
부가가치세	2,871,154	2,765,789	감)105,365
합 계	31,582,700	30,423,680	감)1,159,020

○ 공사기간 연장 : 선행 공정(기계설비, 공정율 95%) 지연에 따른 공기 연장

구 분	당 초	변 경	증․감
공사기간	2019.10.10.~2019.12.08.	2019.10.10.~2019.12.18.	증)10일

3		검토 의견

○ 상기 내용을 검토한 결과, 공기연장 및 시공사 정산대상 보험료 납부실적에 따른 계약금액 변경이 타당하다 사료됨

4		향후 계획

○ 2019. 12. 06.   변경계약

○ 2019. 12. 18.   전염소 투입설비 시운전 및 공사 준공

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.