문서번호	설비부-19706
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
김도형		代곽용길	12/05 임정규
협조

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설』

기계설비공사 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설』

기계설비공사 실정 보고 검토

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설』과 관련하여 물가변동에 의한 계약금액 조정에 대하여 검토하고 보고 드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□ 위    치 : 서울 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

□ 공사규모 : 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+ 비총인 416,000㎥/일(TP 0.18㎎/L) ⇒ 혼합방류(TP 0.46㎎/L)

□ 공사기간 : 2017.11.20.~2020.6.30.(2차 2018.10.10.～2020.6.30)

□ 공사금액 : 2,478백만원(2차 1,703백만원)

□ 도 급 자 : ㈜영풍진흥기업

□ 감 리 사 : ㈜천일, 동부엔지니어링(주), ㈜범창종합기술

추진 현황

□ 2013.05. : 물재생센터 총인처리시설 설치계획 수립(행정2부시장 방침)

□ 2014.08. : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치계획 방침

□ 2017.03. : 실시설계 용역 완료

□ 2017.11. : 기계설비공사 계약 및 1차공사 착공

□ 2018.09. : 기계설비공사 1차분 준공

□ 2018.10. : 기계설비공사 2차분 착공

관련근거(ESC)

□ 관련법규 및 근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 동법 시행령 제73조

□ 물가변동에 의한 계약금액 조정 신청(영풍중랑 제2019-21, ‘19.11.21.)

□ 제2회 물가변동으로 인한 계약금액 조정요청 건 검토 보고(중랑감 제19-476, ‘19.12.2)

계약금액 조정(ESC 2회) 개요

□ 조정방법 : 지수조정(계약조건 적용)

□ 직전 조정일(기준시점) : 2018. 09. 01

□ 조정 기준일(비교시점) : 2019. 09. 01(364일 경과)

□ 조정 신청일 : 2019. 11. 21(영풍중랑 제2019-21)

□ 등락요건(지수조정율) : 3.16%

계약금액 변경 현황                                   (단위:원)

구분	당 초	변경 후	증·감액	비고
총차	*************	*************	**********
2차	*************	*************	**********

물가변동으로 인한 계약금액 조정(ESC 2회) 검토

□ ESC 2회 총괄표                                            (단위:원)

구 분		ESC 2회(도급금액)	비고
①물가변동 대상공사의 계약금액(B)		*************	도급계약서 금액
②물가변동 제외금액(C)		*************
㉮조정기준일 이전 금액		***********	㉯의 공정율 감안
㉯물가변동 조정기준일 (현재공정율)	예정공정율	********
	실행공정율	********
	기성공정율	********	1차준공+2차1회 기성
	제외공정율	********	예정·실행·기성 중 큰값
㉰추가제외금액		**********	보험료 정산항목 추가
③물가변동 적용대가(D)		*************	D=B-C
④물가변동 조정율(A)		*****	지수조정율산정표
⑤물가변동등락 대상조정금액(G)		**********	G=A*D
⑥선급금 공제금액(F)		*	F=D*A*E
⑦경유세율 공제금액(F)		*	해당없음
⑧물가변동 조정 적용대상		**********	⑧=G-F-H

□ 물가변동 적용대가 집계표                                       (단위:원)

비 목			도급금액	적용 제외	적용대가
순공사원가	노무비		***********	***********	***********
	재료비		***********	***********	***********
	경비	기계경비	**********	**********	**********
		산재보험료	**********	**********	**********
		고용보험료	*********	*********	*********
		건강보험료	**********	**********
		연금보험료	**********	**********
		노인장기요양보험	*******	*******
		퇴직금공제	**********	**********
		안전관리비	**********	**********
		환경보전비	*********	*********
		기타 경비	***********	**********	**********
		건설기계대금보증	*********	*********
		하도급대금 보증	*********	*********
	소 계		*************	***********	*************
일반관리비			**********	*********	**********
이윤			*********	*********	*********
공급가액			*************	***********	*************
부가가치세			***********	**********	***********
도급금액			*************	*************	*************
철거고철처리비			**********	**********
물가변동(ESC) 1차			**********	*********	**********
도급금액			*************	*************	*************

책임건설사업관리기술자 검토 의견

□ 계약일로부터 90일 이상 경과(직전 조정일로부터 364일) 되었고 지수조정율(K값)이 100분의 3 이상(3.16%) 되는 비교시점(2019.9.1.)을 조정기준일로 적용하여 물가변동으로 인한 조정요건이 충족됨.

□ 제외대상 공정율을 예정공정표 및 One-PMIS 보고서 등 공정율을 비교검토하여 높은 공정율(실적공정율 41.010%) 적용함이 타당함

□ 물가변동 적용대가 및 지수산출 등이 관련 규정에 따라 적정 산출되어 물가변동으로 인한 계약금액 조정함이 타당하다고 판단됨

보고자 의견

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청에 대한 책임건설사업관리기술자의 검토 의견이 적합하므로 계약금액 조정을 승인하고

□ 향후 설계변경 시 금번 계약금액 조정 내용이 반영될 수 있도록 책임건설사업관리기술자에게 업무지시 하고자 합니다.

따로붙임 1) 제2회 물가변동 계약금액 조정 검토 보고 1부.

2) 용역보고서 1부.  끝.