문서번호	시설과-12250
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
김기봉		12/05 송병욱
협조

「낙산배수지 건설공사」

관급자재(밸브실) 납품기한 연기 검토보고

2019. 12.

상수도사업본부

시설과

「낙산배수지 건설공사」

관급자재(밸브실) 납품기한 연기 검토보고

관급자재(밸브실) 납품기한 연기 관련 건설사업관리인 검토내용을 보고 드림.

관급자재 현황

❍ 건    명 : 낙산배수지 건설공사 밸브실 조달구매

❍ 계약현황

물품 식별번호	품 명	규 격	단위	수량
22435545	밸브보호통또는밸브실	밸브실, 삼영기술 SY-7.2-s,2×2×1.8m,직육면체	개	1
22939984	밸브보호통또는밸브실	밸브실, (부품)삼영기술 SY-GVSupport-M,밸브받침대	개	1

❍ 납품기간 : ’19. 10. 30. ~ ’19. 11. 29

❍ 계약금액 : 10,223,100원

❍ 납 품 사 : 삼영기술주식회사 함윤경

보고내용(건설사업관리인)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-339호(’19.12.04.)

- 관급자재(유량계 복합패널 밸브실) 연기보고

❍ 유량계실 설치위치에 기존배수관 및 신설 퇴수관로가 간섭되어 중부수도사업소와 협의후 유량계실 위치를 변경함에 따라 현장 작업 일정변경 및 납품기한 연기

- 귀책소재 : 상수도사업본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

구분	납품기한	비고
당초	2019.10.30.∼2019.11.29
변경	2019.10.30.∼2019.12.20

검토의견

❍ 지장물로 인한 중부수도사업소와의 유량계실 위치 협의로 작업일정이 변경되어 납품기한을 연기요청한 사항으로 납품기한 연기는 적정

붙임 : 1. 건설사업관리인 관급자재 연기보고 공문 1부.

2. 합의서 및 계약서 각1부. 끝.