투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건축부장
(경유)
제 목	[반송] 준공검사(감독)조서(서울광역푸드뱅크센타 이전 건립 설계용역)

상기 계약건은 지연배상금 부과 대상 건으로 지연배상금을 명기하여 준공조서 재송부 바랍니다.

1. 용 역 명 : 서울광역푸드뱅크센터 이전 건립 설계용역

2. 준공기한 : 2019.5.20.

3. 설계도서 납품일 : 2019.6.25.

4. 준공검사일 : 2019.10.30.

5. 지연배상금 부과기간 : 2019.5.21.~2019.10.30.

※ 건축부-12057(2019.7.12.)호와 관련 2019.6.26.~2019.10.30.일까지의 지연배상금은 지체일수에서 산정제외 처리.  끝.

	총무부장
주무관	고미경		재무예산과장	홍수열		총무부장	12/05 정진일
협조자
시행	총무부-24999	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 11	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-2371	/전송	02-3708-2365	/	tellmi0635@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)