문서번호	설비부-19718
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		代곽용길	12/05 임정규
협 조

- 종각역 북측 지하공간 재생사업 -

전기공사 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 종각역 북측 지하공간 재생사업 -

전기공사 설계변경 검토보고

『종각역 북측 지하공간 재생사업 전기공사』관련 사용자 요청사항 반영에 따른 변경사항에 대하여 건설사업관리단으로부터 설계변경 서류가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

*****************************************************

*****************************

*****************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 종각역 북측 지하공간 재생사업 전기공사

공사위치 : 종로구 종각역 북측 지하공간(종로타워 앞 지하 공공보도)

공사규모

〇 종각역 북측 지하공간 850㎡(조경 145㎡) 조성

〇 태양광 채광시스템 8기(태양광 추적방식, 비구면 거울 + 릴레이렌즈)

공사기간 : 2019. 10. 21. ~ 2019. 12. 15.

도 급 비 : ***************************

도 급 자 : ************

감 리 자 : **************

Ⅲ
		설계변경 사항

변경사유

〇 청년창업지원실 공사범위 추가에 따른 전등, 전열공사 물량 추가

〇 기타 현장여건에 따른 물량 증감사항 반영

〇 미사용 보험료 및 산업안전보건관리비 감액 정산

주요물량 변경내용

품 명	단위	규 격	수량			변경내용
			기존	변경	증감
************
***********	*	*******	***	***	***	************ ********
******	*	*****	**	**	**
******	*	******	***	***	***
****	*	******	**	**	**
**********
***********	*	*******	**	***	***	************ ********** ************ *******
*****	*	********	**	**	**
********	*	**********	****	****	****
*********	*	***	**	*	***
*********	*	***	**	*	***
*********	*	***	*	**	***
*********	*	****	*	*	**
*****	*	****	**	**	**
**********
***********	*	*******	***	***	***	************ *****
******	*	*****	**	**	**
********	*	**********	***	*****	****

설계변경 금액

구 분		변경전	변경후	증감액	비고
직접공사비	1 전력간선설비	**********	**********	*
	2 자동제어설비	*********	*********	**********
	3 전등설비	**********	**********	************
	4 전열설비	*********	*********	************
	소 계	**********	**********	************
경 비		*********	*********	************
일반관리비		*********	*********	*********
이 윤		*********	*********	**********
공 급 가 액		**********	**********	************
부가가치세		*********	*********	**********
합 계		**********	**********	************

Ⅳ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

〇 상기 검토사항과 같이 종로구청 요청사항(청년창업지원실 공사범위 추가) 등을 반영하고 미사용 보험료 및 안전관리비 감액 정산하여 설계변경함이 타당함

조치계획

〇 전기공사 변경에 대한 건설사업관리단 검토결과 적정하다고 보고되었으며 계약금액 조정검증 결과 과다 산출액이 없음을 확인하여 동 공사 건에 대하여 총무부에 설계변경 계약 의뢰하고자 함

**********************

****************

*******************   끝.