문서번호	역사도심재생과-13125
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도심정책팀장	역사도심재생과장
김성자		이기원	12/05 조남준
협조

서순라길 도로정비사업 현장 합동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

도 시 재 생 실

(역사도심재생과)

서순라길 도로정비사업 현장 합동점검 계획

창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업 추진과 관련 시공중인 서순라길에 대한 지적사항이 있어 관계기관 합동점검을 실시하여 시공품질 향상 및 안전성을 확보하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 추진근거

○ 도성한복판 도시재생 활성화 사업 현장 점검철저(시장요청사항, 957)

- 서순라길 공사와 가로수 이식 공사가 제대로 되지 않고 있어 현장을 꼼꼼히 점검하고 개선방안 보고 바람

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업

○ 사업기간 : ‘17.4 ~ ’20.8

○ 사 업 비 : 16,258백만원(도시개발특별회계 14,390, 도시재생기금 1,868)

※ 낙원상가 하부 공용공간(앵커시설) 설계비 및 공사비 포함

○ 사업규모

가로명	규모	주요내용
돈화문로	길이800m 도로폭 20~22m	궁궐가는길 조성 (역사경관회복, 보행자중심도로)
피마길	길이800m 도로폭1.5m	가로환경개선
돈화문로 10·11길	길이400m 도로폭15m	생활문화거리 조성
낙원상가 하부	하부면적 6,940㎡	하부경관개선
서순라길	길이820m 도로폭10m	귀금속특화거리 조성

□ 추진경위

○ ‘17.09~‘18.10 : 기본 및 실시설계(동해종합기술공사)

○ ‘18.05.10 : 도시재생활성화계획 결정

○ ‘18.12.26 : 공사착공(다이치종합건설, 천하건설)

○ ‘19.05.17 : 공사이관 및 공사중지 요청(구→시)

○ ‘19.05.28 : 공사이관 불가 보고(구 자체 종결)

○ ‘19.06~   : 관계기관 실무회의(종로구 요구사항 검토)

○ ‘19.09~   : 공사재개(낙원상가 하부, 돈화문로, 서순라길)

○ ’19.10.26  : 서순라길 공사시행

○ ‘19.11.04  : 준공기한 연기(’19.12.31→‘20.8.31)

○ ’19.12.01  : 보도공사 동절기 공사중지

Ⅱ		점 검 계 획

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘19.12.12(목) 14:00~

○ 점검대상 : 서순라길

○ 점 검 자 : 총 6명

- *********************

- *********************

- *********************

○ 점검방법 : 현장 합동점검

□ 점검내용

○ 주요 공정 등 사업내용 임의 변경 여부

○ 공사 현장관리(안전, 시공품질관리) 적정 여부

○ 동절기 대비 공사로 인한 보행불편사항 점검 등

Ⅲ		향 후 계 획

○ ’19.12 : 현장 합동점검 실시 및 지적사항 조치 예정.  끝.