	서울식물원
수신	기획행정과장
(경유)
제목	서울식물원 쿨링포그 설치사업 설계변경 시행

1. 시설운영과-3862(2019.12.3.)호와 관련입니다.

2. □서울식물원 쿨링포그 설치사업□ 추진과 관련하여 현장여건에 따른 물량변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계 변경하여 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 서울식물원 쿨링포그 설치사업

나. 대 상 지: 서울식물원내 호수원 일대

다. 공사기간: 2019. 11. 1 ~ 2019. 12. 10.

라. 공사내용: 서울식물원내 쿨링포그 설치 및 기반시설 구축

마. 도 급 자: ㈜이누스디엔씨 대표 신창목

바. 도 급 비

- 변경전: 금161,773,190원

- 변경후: 금159,101,000원(감2,672,190원)

※ 제비율 검증에 따른 조정 포함

사. 변경사유: 현장여건에 따른 물량 조정

아. 예산과목: 서울식물원 시설운영과 식물종다양성보전을 통한 세계적수준의식물원운영, 식물원운영관리 및 이용활성화, 서울식물원내 쿨링포그 설치, 시설비, 시설비

붙임 1. 설계변경보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율검증결과 1부.  끝.

	서울식물원장
주무관	김영대		시설운영과장	윤학수		서울식물원장	전결 12/05 代문선엽
협조자	주무관	장나미
시행	시설운영과-3948	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2104-9732	/전송		/	imkyd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)