문서번호	토목부-22508
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	12/05 代이동훈
협조	주무관		황윤기
	주무관		노순재

녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 정산 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

2019. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 정산보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 구간에 인수기관 요청 및 민원 사항 반영, 예산 절감 조치 등을 실시하고 정산하고자 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(동부간선) 2019-251호(2019.12.03.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모 : 도로확장 4차로→6차로, 연장 1,400m

○ 도 급 비 : 29,231백만원(7차 8,000백만원)

○ 공사기간 : ′08.12. ~ ′21.06.(7차 ′19.01. ~ ′19.12.)

○ 시 공 사 : ㈜풍산건설 외 1  /   감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		감리단 검토내용

○ 검토배경

- 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사를 시행함에 있어 예산 절감 및 민원해소를 위해 배수 및 포장공사를 일부 변경 시행하여 정산(감액)하고

- 추가로 민원사항, 유관기관(노원구, 철도공단 등) 요청사항 등을 반영하고자 보고드림.

○ 주요변경 내용

구 분	변경개요 및 사유	변 경 내 용		비고
		당 초	변 경
유관기관 요구사항	녹천역구간 도로와 철도간 노면수 처리를 위한 배수로 설치 요구사항 반영 (요청기관: 한국철도공사)	-	배수처리용 PE배수로 210m 등
	관리이관 전 사전 합동점검 시 요구사항 반영 (요청기관: 도봉구청,노원구청)	-	보행자 통행안전용 볼라드 8개소 등
민원처리	공사 중 통행불편 민원에 따른 기존포장깨기 및 신설포장 변경 (기존콘크리트 포장 활용)	전면차단 후 기존 포장깨기+신설포장 기존포장깨기 1,925㎥ 신설포장 2,156㎡	통행로 확보후 기존 포장 일부깨기+신설포장 기존포장깨기 122㎥ 신설포장 2,432㎡	예산절감
	공사 중 통행불편 민원에 따른 우수관로 변경설치 (기존관로 연결)	전면차단 후 공사 도로중앙 우수관신설 D600,L=238m 외	통행로 확보 후 공사 보도부 우수관신설 D500,L=204m 외 + 기존관로연결	예산절감
	공사 중 통행불편 민원에 따른 임시 보행로 확보 (본선 철거된 휀스 재사용)	-	보행자 통행안전용 난간(H1.0) L=204m외
	신설보도구간 어린이 통학로 안전사고 예방을 위한 방호 울타리설치 요구사항 반영 (요청기관: 노원구청)	-	보행자 통행안전용 방호울타리(H1.2) L=514m 등

○ 녹천역 노면수 처리를 위한 배수로 설치

당 초	변 경

※ 한국철도공사 요청사항(토목과-2599호, 2019.02.21.)

○ 관리이전기관 합동점검 요청사항 반영

구분	지적 및 요청사항	조치계획	비 고
노원 구청	보차도경계석 미끄럼방지 보완	현장 조치 완료
	녹천역 #4번출구앞 횡단보도 경계석단차발생	현장 조치 완료
	보도진입부 볼라드 설치(8개소)	설계 반영
	건재상 법면처리 미흡	현장 조치 완료
	보도기각부 및 도로사면 단부 배수처리 미흡	현장 조치 완료
	맨홀주변 보도블럭 단차발생	현장 조치 완료
	뒷채움 전구간 보도블럭 마무리 시공	설계 반영
	건재상 진출로 토사유출 방지	현장 조치 완료
도봉 구청	맨홀보완: 인버트설치, 표찰, 뚜껑교체(우수→하수),높이조절 재시공	현장 조치 완료
	빗물받이보완: 이토실 매움, 구체 파손부 복구, 경계이탈부 처리	현장 조치 완료

○ 실시공(포장 관련) 물량 정산

- 당초 기존 콘크리트 포장 전면 철거 후 신설 포장 계획하였으나 예산절감 및 민원해소(공기 단축)를 위하여 기존 콘크리트 포장의 일부만 깨기 및 절삭 후 신설 포장 실시

당 초	변 경

- 물량 증·감표

구분	당 초	변 경	증 ·△감	비고
흙깍기	6,314㎥	5,491㎥	△ 823㎥
사토	6,601㎥	5,703㎥	△ 898㎥
포장깨기	1,925㎥	122㎥	△ 1,803㎥
포장절삭	-	1,224㎡	1,224㎡
보조기층	844㎥	1,409㎥	565㎥
아스콘포장	2,156㎥	2,432㎥	276㎥

○ 우수관로 위치 변경

- 당초 공사 구간 전면 차단 후 중앙에 우수관로를 신설토록 설계되었으나, 통행불편에 따른 민원 제기로 인해 유관기관(경찰서, 노원구청) 협의를 거쳐 우수관로를 보도 하단부로 변경 설치

당초
변경

- 물량 증·감표

구 분	당 초	변 경	증 ·△감	비 고
우수관	D600, L=238M	D500, L=204m	△ 34m
맨홀	8개소	5개소	△ 3개소
집수정	4개소	2개소	△ 2개소
빗물받이	31개소	15개소	△14개소

※ 도로를 부분적으로 확장하므로 우수량 증가가 미비하여 기존 배수관 사용 가능 (원설계자 의견 및 수리 검토 결과)

○ 공사 중 보행자(어린이) 통행 불편 민원에 따른 보행로 확보

당 초	변 경

- 물량 증·감표

구 분	당 초	변 경	증 ·△감	비고
안전난간(H=1.0m)	-	204m	204m
보행로 기초CON`C	-	24㎥	24㎥

※ 예산 절감을 위하여 철도이설구간에서 철거한 난간 재사용

○ 보행자(어린이) 안전사고 예방을 위한 방호울타리 설치

- 해당구간은 녹천역 이용자가 많은 구간이며, 특히 청일초등학교 학생들의 통학로로 안전(교통)사고 방지를 위한 보행자 울타리 설치 필요

당 초	변 경

○ 공사 물량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증‧ᐃ감
토공
흙깍기		*	*****	*****	**********
사토		*	*****	*****	**********
사면보호		*	*****	*****	*
포장깨기	아스콘,콘크리트	*	*****	***	************
배수공
우수관	D600→D500	*	***	***	*********
맨홀	각종	**	*	*	********
집수정	각종	**	*	*	********
빗물받이	300x800	*	**	**	*********
측구수로관	400x400	*	***	***	*
PE배수로	300x200	*	*	***	***
포장공
보차도경계석	인조화강석	*	***	***	*
도로경계석		*	***	***	**
포장절삭		*	*	*****	*****
보조기층포설		*	***	*****	***
아스콘포장		*	*****	*****	***
보도포장	인조화강블럭	*	***	***	*********
부대공
표지판	각종	**	**	**	*
볼라드	D150X900	**	*	*	*
차선도색	융착형	*	***	***	**
보도난간	임시통행로	*	*	***	***
공사중안전시설	PE드럼외→PE방호벽외	*	***	***	***
보행자 방호울타리	H1.2xW2.0	*	*	***	***
사급자재대
레미콘	각종	*	***	***	**********
아스콘	각종	***	***	***	***
골재	각종	*	*****	***	**********
흄관	각종	*	***	***	*********
폐기물공
임목폐기물		***	*	***	***
건설폐기물		***	*****	***	************

○ 공사비 증·감 현황                                          (단위 : 원)

구 분	단위	수량	금 액		증⋅ᐃ감	비고
			당 초	변 경
1. 토 공	*	*	***********	***********	******************
2. 배수공	*	*	**********	**********	******************
3. 포장공	*	*	**********	**********	*********
4. 부대공	*	*	**********	***********	***********
5. 사급자재대	*	*	***********	***********	******************
가. 순공사비			***********	***********	**********
나. 제 경 비	*	*	***********	***********	*****************
다. P.S(임목폐기물외)	*	*	*********	**********	**********
A. 도급공사비			***********	***********	***********
B. 폐기물처리비	*	*	***********	**********	*******************
공사비 계			***********	***********	*******************

○ 감리단 종합의견

- 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 중 주민들의 통행 불편에 따른 민원 해소 및 예산 절감을 위해 배수 및 포장공사를 일부 변경 시행하고 정산(감액)함이 타당하다고 판단되며,

- 관련기관(한국철도공사, 노원구청, 도봉구청)의 요청사항 등에 대해서도 상기 검토내용과 같이 설계에 추가 반영함이 타당하다고 사료됨

Ⅲ		조치계획

○ 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사와 관련하여 감리단의 검토의견과 같이 정산하는 것이 타당한 것으로 판단되어 반영하고자 함.

붙임  1. 감리단 검토 의견서 1부.

2. 우수관로 위치조정에 따른 원설계자 의견 및 수리계산서 1부.  끝.