문서번호	시설보수과-6720
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	12/05 이성재
협조

『소화조 내부 보수공사』

설계변경 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 내부 보수공사』

설계변경 시행보고

우리센터에서 시행중인 『소화조 내부 보수공사』와 관련 공단의 설계변경 검토 보고건에 대하여 아래와 같이 조치하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 설계변경 검토보고서 제출[서울시설공단 공사감독2처-19771(2019.12.04.)]

Ⅱ		공사현황

○ 공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

○ 공사기간 : 2019.09.17. ~ 2020.05.31.

○ 도 급 자 : 명두건설(주)  대표 윤오임

○ 도 급 비 : 1,816,284,000원

○ 공사개요 : 단면보수 2,428.5㎡, 표면처리 7,604.0㎡, 부대공 1식

Ⅲ		보고내용

○ 설계변경사유 : 시공물량 증ㆍ감

○ 주요 설계변경 내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
철근노출 단면보수	t=30mm	㎡	2,428	1,214	감1,214
	t=60mm		-	1,180	증1,180
콘크리트 단면제거	치핑	㎥	72	108	증36
표면처리	HWD, RW, 라파	㎡	7,604	7,514	감90
비계발판	3개월	㎡	3,421	4,042	증621
비계구조검토	2,3처리장	식	-	1	증1

○ 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		1,816,284,000	1,989,699,000	증173,415,000
도급비	공급가액	1,651,167,273	1,808,817,273	증157,650,000
	부가가치세	165,116,727	180,881,727	증15,765,000
	계	1,816,284,000	1,989,699,000	증173,415,000

Ⅳ		조치계획

○ 상기 내용 등에 대하여 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 1. 공단 설계변경 문서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.
4. 변경수량산출서 1부.

5. 변경도면 1부.

6. 관련보고서 1부.  끝.