문서번호	공간정보과-10677
결재일자	2019.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	공간정보과장		시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정은화	이태형		신용철		12/05 代이상국
협 조
	기획예산과장					代이호성

상수도 GIS 성능개선사업 및 감리용역

사업기간 변경계획

2019. 12.

상수도사업본부

(공간정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「윈도우 운영체제변경 및 Non-ActiveX를 위한」

상수도 GIS 성능개선사업 및 감리용역 사업기간 변경 계획

Non-ActiveX기반 상수도 GIS 성능개선사업 진행중 과업 이외의 사용자 요구사항이 추가로 발생하여 사업에 반영하고 사업 및 감리용역 기간을 연장하여 추진하고자 함

Ⅰ		상수도 GIS 성능개선 사업

□ 용역개요

□ 사업명 : 2019년 상수도 GIS 성능개선사업

□ 사업기간 : 2019. 6. 18.~ 2019.12.31.(6.5개월)

□ 업 체 명 :***********

□ 계약금액 :***********

□ 주요 사업내용

‣ 접근성/보안성 향상을 위한 Non-ActiveX 기반의 GIS Web시스템 개발

- HTML5, 크로스 브라우저 지원과 같은 최신 기술 적용

- 화면 유저인터페이스(UI)/사용자 경험(UX) 개선

‣ 빅데이터 서비스 기반의 Decision Map 분석 서비스 기능 구현

- 축척된 데이터를 활용한 계량기 동파, 누수복구 등 Decision Map 분석 서비 스 기능 구현

‣ 시설관리 업무 지원을 통한 통계 기능 강화

- 차트, 통계, 보고서 지원 등 통계 기능 강화

‣ 연관 시스템과의 연계기능 테스트 수행, 영향도 분석을 통한 문제점 사전 도출 등 안정적이고 체계적인 시스템 연계업무 지원 방안 수립 등

□ 그간 사업추진현황

날 짜	추 진 내 용	비 고
2019.01.29	상수도GIS 성능개선사업 발주계획 수립
2019.02.08	S/W적정 사업기간 산정위원회 결과보고
2019.02.11	제안요청서 검토
2019.02.12	정보화사업용역 계약심사 요청
2019.03.07	상수도 GIS 성능개선사업 공고(1차)	1개업체 응찰(유찰)
2019.04.05	상수도 GIS 성능개선사업 공고(2차)	1개업체 응찰(유찰)
2019.04.29	상수도 GIS 성능개선사업 공고(3차)
2019.06.18	계약체결
2019.06.24	착수보고회 개최
2019.12.23	중간보고회 예정

□ 변경내용

□ 변경사유 : 상수도 GIS 성능개선사업 진행중 본 과업 이외의 사용자   요구사항이 추가로 발생하여 추가개발을 위한 사업기간 연장이 필요함

□ 변경내용

‣ 추가 과업내용 : 4건(붙임참조)

‣ 개발업체 수용 여부 : 수용(붙임참조)

구 분	당 초	변 경	증 감
사업기간	2019.06.18.～2019.12.31	2019.06.18.～2020.02.28	2개월 연장
사업금액	618,200,000원	618,200,000원	변경없음

□ 귀책사유 : 발주청(추가 과업으로 인한 공기 부족)

□ 지연배상금 부과여부 : 없음

Ⅱ		상수도 GIS 성능개선사업 감리용역

□ 용역개요

❍ 사 업 명 : 2019년 상수도GIS 성능개선사업 감리용역

❍ 사업기간 : 2019.08.30~2019.12.31.

❍ 사 업 자 : *********

❍ 사업금액 : ********

❍ 사업대상 : 상수도GIS성능개선사업 감리용역

❍ 감리대상 사업내용

- 상수도 GIS 응용프로그램 Non-ActiveX기반 Web 개발

- 빅데이터 서비스 기반 Decision Map분석 서비스 구현

- 시설관리 업무 지원을 통한 통계기능 강화등

GIS 성능개선사업 진행에 따른 사업 감리 추진

□ 그간 사업추진현황

날 짜	추 진 내 용	비 고
2019.06.20	상수도GIS 성능개선사업 감리용역 계획 수립
2019.07.11	상수도GIS 성능개선사업 감리 사업 공고
2019.08.30	용역 계약 체결
2019.09.30 ～ 2019.10.04	1단계 설계단계 감리 실시

□ 변경내용

□ 변경사유 : 상수도 GIS 성능개선사업의 사업기간이 연장됨에따라 감리용역기간도 사업기간과 동일하게 연장이 필요함.

□ 변경내용

‣ 2단계 종료감리 실시 : 2020. 2월 예정

구 분	당 초	변 경	증 감
사업기간	2019.08.30.～2019.12.31	2019.08.30.～2020.02.28	2개월 연장
사업금액	59,549,000원	59,549,000원	변경없음

□ 귀책사유 : 발주청(추가 과업으로 인한 공기 부족)

□ 지연배상금 부과여부 : 없음

□ 행정사항

□ 변경계약 의뢰 : 재무회계과

□ 변경계약에 따른 사고이월 처리 : 기획예산과

붙임  1. 과업 추가개발 목록 1부.

2. 과업추가에 따른 업체 공문 1부.  끝.