과 장		12/05 代유진석	심사자	민병훈		설계자		하승환	설 계		심 사		결 재
									2019년 12월 05일		2019년 12월 05일
설 계 서
	용 역 명 : 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리용역(1권역)- 장기계속 1차분
	구 분				금 액							비 고
					당 초		변 경			증 ․ 감
	총 용 역 비				￦704,600,000원		￦708,550,000원			증) 3,950,000원
	용역비	공 급 가 액			￦635,080,655원		￦638,671,564원			증) 3,590,909원
		손 해 배 상 보 험 료			￦5,464,800원		￦5,464,800원			0
		부 가 가 치 세			￦64,054,545원		￦64,413,636원			증) 359,091원
		계			￦704,600,000원		￦708,550,000원			증) 3,950,000원
설계변경 개요 1. 투입인원 : 고급건설기술자 기준 40.46인.월→40.71인.월 2. 용역기간 : 8.29개월 → 8.53개월