＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	전기공사 변경계약 시행〔1취수장 전염소 투입설비(인젝터) 전기공사〕

우리 센터에서 시행 중인 「1취수장 전염소 투입설비(인젝터) 전기공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 1취수장 전염소 투입설비(인젝터) 전기공사

나. 계약금액 : 금31,582,700원(금삼천일백오십팔만이천칠백원)

다. 공사기간 : 2019. 10. 10. ~ 2019. 12. 08.

라. 계 약 자 : 주식회사 신라전기 대표이사 임인식

마. 변경계약 내용

구 분	당 초	변 경	증·감
계약금액	금31,582,700원	금30,423,680원	감)1,159,020
공사기간	’19.10.10.~’19.12.08.	’19.10.10.~’19.12.18.	증)10일

바. 변경사유 : 선행 공정 지연 및 정산대상 보험료 납무실적을 반영한 공기연장과 계약금액 조정

사. 지체상금 부과여부 : 미부과〔선행 공정(기계설비) 지연에 따른 전기공사 공기연장〕

붙임  1. 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	박희정		주무관	김희수		정수시설과장	12/05 양영민
협조자	주무관	변민용
시행	정수시설과-13179	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)