투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 설계변경 계약 의뢰(1차1회) - 개봉철도고가 성능개선공사

우리 본부에서 시행 중인『개봉철도고가 성능개선공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 설계변경(1차 1회)시행하고 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: 개봉철도고가 성능개선공사 건설폐기물처리용역

2. 용역개요: 폐아스콘 1,768톤, 폐콘크리트 5,549톤, 혼합폐기물 51톤

3. 도 급 자: ㈜삼양이앤디  대표 최훈성

4. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		용역비	착공일	준공예정일	비 고
총 괄	당 초	231,687,230	2019.11.11.	2021.11.30.
	변 경	231,687,230	2019.11.11.	2021.11.30.
	증･감	변경없음		변경없음
1차 (1회)	당 초	12,353,000	2019.11.11.	2019.12.31.
	변 경	3,144,000	2019.11.11.	2019.12.31.
	증･감	감)9,209,000		변경없음

5. 변경사유 : 차수(1차) 폐기물 수량 정산 반영

6. 예산과목: [도시개발특별회계] 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 개봉철도가 바닥판 교체 정비공사, 시설비 및 부대비(401), 시설비(01)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 건설사업관리자 검토의견서 1부.

3. 변경 설계서(1차 1회) 및 합의각서 1부.

4. 변경 내역서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김동수		터널건설과장	여용석		토목부장	12/05 代이동훈
협조자
시행	토목부-22522	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)