문서번호	건축부-21277
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설계과장	건축부장
박병혁		이영욱	12/06 임인구
협조
	주무관		고병연

「동부기술교육원 가설건축물 건립공사」

공사발주 시행계획

2019. 12

도시기반시설본부

(건 축 부)

「동부기술교육원 가설건축물 건립공사」

공사발주 시행계획

「동부기술교육원 가설건축물 건립공사」의 건축공사 시행계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 동부기술교육원 가설건축물 건립공사

○ 위    치 : 서울특별시 강동구 고덕동 317-4

○ 규    모 : 1층규모 2개동, 총 면적 545.44㎡

○ 구    조 : 경량철골판넬조

○ 용    도 : 가설사무실 및 창고

○ 존치기한 : ’20. 1 .1 ~ ’22. 12. 31.(3년)

○ 공사기간 : ’19. 12 . ~ ’20. 3. (90일)

○ 사 업 비 :*******

*********************************************

○ 사업추진경위

- ’19.  8. 30. : 동부기술교육원 가설건축물 건립계획 수립

- ’19. 10. 30. : 설계용역 계약 및 착수

- ’19. 11. 08. : 공사 협조 요청(일자리정책과→도시기반시설본부)

- ’19. 11. 22. : 설계용역 준공

- ’19. 11. 28. : 가설건축물 축조 신고(일자리정책과→강동구청)

2		공사발주 계획

○ 공 사 명 : 동부기술교육원 가설건축물 건립공사

○ 공사기간 : 착공일로부터 90일

○ 공 사 비 : 386,183,836원

○ 입찰방식 : 제한경쟁입찰(지역제한), 긴급입찰, 현장설명 미실시

- 발주의뢰부서(경제정책실 일자리정책과)의 사업추진 계획상 촉박한 일정에 따른 이월예산의 조속한 집행으로 예산불용 방지 및 기한 내 사업을 완료하고자 긴급공고 추진

○ 입찰자격

-  건설산업기본법에 의한 종합공사를 시공하는 업종 중 건축공사업 또는 토목건축공사업 면허를 보유한 업체로서 입찰참가자는 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 자이어야 함.

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제9조, 동법 시행령 제 20조 및 동법시행 규칙 제25조 제3항

○ 결정방법 : 시설공사 적격심사

- 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정자치부 예규 제19호,  ‘17. 12. 13.) 제2장 시설공사 적격심사 세부기준 <별지5>

○ 관련규정

- 제한경쟁 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조 및 같은법 시행령 제20조

- 현장설명 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제15조 제3항 단서규정에 따라 생략

○ 하자보증기간

-「지방계약법 시행규칙」제68조 및「건설산업기본법 시행령」별표4(건설공사의 종류별 하자담보책임기간)에 따름

3		향후 계획

○ ’19.12. : 공사 계약 및 착수

○ ’20. 3. : 공사 준공

붙임 : 1. 계약요청서(동부기술교육원 가설건축물) 1부.

2. 가설건축물 축조 신고필증(동부기술교육원) 1부.

3. 긴급공고 및 제한경쟁입찰 사유서 1부.

4. 설계내역서, 예정공정표 각 1부.

5. 설계내역서 적정 자문 검토 결과 1부.  끝.