문서번호	설비부-19800
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/06 임정규
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

2019. 12

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 공사 』와 관련 건설사업관리단으로부터 CCTV설치 변경사항 등에 대한 실정보고 접수되어 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 전기공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31.(`20.12월 연기 예정)

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 지하차도 320m

□  시 공 사 : *******

□ 공사금액 : *********************

□ 공 정 률 : 90%(통신)

2		관련근거

□ 율곡감 제2019-234호(`19.11.29): 감리단 통신공사 실정보고

□ 북부도로사업소 기전과-5590(`19.6.7): 지하차도 업무협의 회신

□ 사각지대 우려로 지하차도 내·외부 CCTV 추가 설치 요청 등

□ 혜화경찰서 생활안전과-3876(`16.8.19): 지하보도 CCTV 등 강화 권고

3		실정보고 내용

□ 창경궁측 보도BOX CCTV

○ 내용 : 지하보도BOX 사각지대 최소화하기 위해 5대 설치 도급공사 반영

○ 사유 : `16.8월 종묘측 보도BOX 개통시 혜화경찰서에서 CCTV설치 강화           권고하였음. CCTV 관급발주 시 상당시간 소요되어 `16.9월부터 도급분으로           설치·운용하고 있으며, 현재 시공중인 창경궁측 보도BOX에도 동일규격으로             설치 필요

□ 지하차도 CCTV

○ 내용 : 지하차도 내·외부 사각지대 우려로 4대→8대 설치

○ 사유 : 향후 관리기관인 북부도로사업소 요구사항 반영

□ 주요 변경 내용

공종	주요 변경사항	변경 사유	직접비 (단위:천원)
CCTV 설비	[창경궁 보도BOX] ·CCTV설치(도급) 증)5대 ·CCTV설치 물량 증가에 따른 배관배선 물량 증가	`16.9월 설치 완료된 종묘측 보도BOX와 동일하게 설치하여 사각지대 최소화	********
	[지하차도(차량통행) 내·외부] ·CCTV(관급) 설치 4대→8대 ·설치수량 증가에 따른 배관 배선 물량 증가	[북부도로사업소 요구사항 반영] -지하차도 내·외부 사각지대 최소화 하기 위해 추가
	·CCTV케이블 규격 변경 UTP→광케이블	CCTV렉으로부터 거리가 먼 부분은 신호감쇄로 광케이블설치
<직접비 소계>			********
<제경비 소계>			********
<도급비>			********

○ 도급공사

○ 관급자재

공종	변경사항	변경 사유	변경금액 (단위:천원)
CCTV 관급	·CCTV렉 설치 0대→1대	기 설치된(`19.9월)렉 재사용하려 하였으나, 수납하려는 관급자재 SIZE(깊이) 커서 설치 불가	*****
	·CCTV 4대→8대 (CCTV광 제어함체 포함)	-지하차도 내·외부 사각지대 최소화 하기 위해 추가	********
	<합 계>		********

□ 건설사업관리자 의견

○ 지하차도 내부 사각지대 최소화와 관리기관(북부도로사업소) 요구사항을 반영           하여 CCTV추가 설치함이 적정하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□  본 현장에 설치되는 CCTV는 향후 북부도로사업소(기전과)에 인수        인계 예정으로, 사업소 담당자와 현장확인 결과 위 내용과 같이 요구        사항을 반영함이 타당하다고 판단되므로 실정보고 승인하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)북부도로사업소 관련공문 1부.

3)혜화경찰서 관련 공문 1부. 끝.