	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	내진성능보강 및 증축 공사 건축분야 설계내역 변경보고

1. 관련근거

가. 더윈우 제19-1121-01호 “실정보고 건(건축감리 경유)”

나. 소방행정과-13478(201911.22.)호 “내진성능보강 및 다목적 소방훈련장 증축공사(건축) 계약 변경 계획”

다. 소방행정과-13865(2019.12.6.)호 “내진성능보강 및 증축 공사 실정보고 접수 및 검토계획(건축)”

2. 내진성능보강 및 다목적 소방훈련장 증축 공사 건축분야 “실정보고 건” 접수에 따른 설계변경 공사비 증액의 타당성이 인정되어 다음과 같이 설계내역을 변경하고자 합니다.

가. 실정보고 개요

1) 건    명: 내진성능보강 및 다목적 소방훈련장 증축 공사 건축분야 실정보고 건

2) 공사규모: 증축부 연면적 318.57㎡, 높이 9.9m, 댐퍼 7개소 설치 등

3) 계약금액: ***************************

4) 시 공 사: ********

나. 실정보고 사항

1) 실정보고 내역(세부내역 붙임)                                          (단위: 원)

구 분		기존(설계)①	변경(업체)②	증감(②-①)
		금 액	금 액
건축 공사	가설공사	**********	**********	*********
	철근콘크리트공사	*******	**********	**********
	금속공사	**********	**********	*********
	창호공사	**********	**********	*********
	수장공사	***********	***********	*********
	도장공사	**********	**********	*********
	철거공사	**********	**********	**********
	기타공사	**********	**********	**********
소계		***********	***********	**********
내진성능보강	전단벽보강			**********
소계				**********
재 료 비				**********
노 무 비				**********
경 비				**********
일 반 관 리 비				*********
이 윤				*********
폐기물처리비				*********
공 급 가 액				***********
부 가 가 치 세				**********
합 계				***********

2) 설계변경 및 공사비 증액 검토

구 분	실정 보고	내역 검토	검토 승인
대 상	********	*********	*****
내 용	*******************	********** *************	** ************

다. 조치계획

1) 건축감리 검토의견 반영하여 설계변경 인정(의견없음 통보)

2) 건축 시공사에 ‘실정보고 건’ 승인 통보

3) 향후 시공상 ‘실정보고 건’을 수합하여 일괄 변경계약 체결

붙임  1. 실정보고 내역서 1부.

2. 감리의견서 1부.  끝.

담당자	김성용		장비회계팀장	김동욱		소방행정과장	代김동욱		소방서장	12/06 김두일
협조자
시행	소방행정과-14046	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌동 강서소방서) 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-2119	/전송	02-3663-1130	/	kcd0306@seoul.go.kr	/	부분공개(5)