＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행[2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)-3회차]

1. 시설관리과-24103(2019.12.6)호 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진하고 있는『2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)』건에 대하여 아래와 같이 계약변경을 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)

나. 계 약 자 : **************

다. 계약기간 : 2019.04.01. ~ 2020.03.31.

라. 변경사유 : 계약물량 증감 발생 등

마. 계약금액

[단위 : 원]

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총 부기금액		금61,160,250원	금61,160,250원	0	총 부기금액 변동없음
1차수	‘19년 계약금액	금55,000,000원	금50,293,440원	감)4,706,560
2차수	‘20년 계약금액	금6,160,250원	금10,866,810원	증)4,706,560

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비  (아리수올림터, 배수지 기전설비 유지보수)

붙임 : 1. 변경내역서 1부

2. 합의서 1부

3. 보고서 1부.  끝.

주무관	김재현		기전팀장	정진호		시설관리과장	이경희		강서수도사업소장	12/06 배현숙
협조자	주무관	김영화		행정관리팀장	송성하
시행	시설관리과-24137	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 4층 시설관리과 (신정동)	/
전화	02-3146-4024	/전송	02-3146-4039	/	jh0031kim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)