문서번호	기반시설과-4042
결재일자	2019.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
김일문	代정창수	12/06 代손창열

설계변경 사항보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부 시설부

설계변경사항보고

‘19년 승강기설치공사 예산잔액 발생함에 따라 추진공인 공사의 차수별 물량조정등 시행하여 집행잔액의 최소화 및 공사의 원활한 추진과 예산의 적정한 집행을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 성수대교북단외2개소승강기설치공사

○ 위    치 : 성수대교북단,성수대교남단, 동작대교북단

○ 도 급 비 : 3214000000(1차 1,040,000천원)

○ 도 급 사 : 명남종합건설(주)외1개사

○ 공사기간 : 2019.11.4.~2020.12.20

□ 설계변경 배경

○ 2019년 승강시설치공사 예산 4,121,198,670원중 가양대교남단외2개소승강기설치공사의 예산잔액 발생됨에 따라 성수대교북단외2개소승강기설치공사의 차수간 물량조정 시행하여 적정한 예산 집행 및 공사의  원활한 추진필요

□ 예산 현황

(단위:원)

사 업 명	예산현액	품의가능액	비 고
한가공원 한강교량 연결 승강기설치	4,121,198,670	55,586,430

□ 설계벼경사항

(단위:원)

구 분	도 급 비						비고
	총 차		1 차			향 후
	당 초	변 경	당 초	변 경	증․감
공사비	3,244,489,000	3,244,489,000	1,040,000,000	1,095,586,430	55,586,430	2,148,902,570
공 사 기 간	2019.11.1.~ 2021.12.20	“변경없음”	2019.11.4.~ 2020.6.30	“변경없음”

□ 설계변경사유 : 차수별 물량조정

□ 검토사항

○ 공사의 원활한 추진과 예산의 적정한 집행을 위하여 ‘19년도 잔여 예산에 대하여 성수대교북단외2개소승강기설치공사 1차공사의 물량을 조정 설계변경(증액)시행하여 사고이월 시행함이 타당할 것으로 판단됨.(총차금액 및 공사기간 변경없음)

□ 예산과목

○ 한강공원관리 및 운영,한강공원시설관리및개선,한강공원 접근시설유지관리(한강교량 한강공원 연결 승강기설치).

따로붙임 : 설계변경 내역서