문서번호	도시철도사업부-12230
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신림선과장	도시철도사업부장
조규영		권영민	12/06 代최문기
협 조

- 신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구) -

휴일 작업계획(2019년 12월 1주차) 변경 승인 보고

2019.12.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

휴일 작업계획(2019년 12월 1주차) 변경 승인 보고

신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구) 관련 ‘19년 12월 1주차 휴일작업 변경 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

1				휴일 작업계획 변경 승인 요청내용

관련 근거 : 신림(3공구)제2019-418호(´19.12. 6.)

휴일 작업계획 변경

- 12. 8(일)

2				휴일 근무 계획

관련근거

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제4장 제5절 4.0 (휴일 및 야간작업)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제6장 제2절 6.2.2 (휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제6장 제2절 6.2.3 (휴일 및 야간작업 근무 요령)

휴일 작업계획 변경 사유

- 원활한 공정추진 및 연속적인 작업시행을 통해 작업공간 확보, 가시설 공정 등을 주변 유동인구 최소 시간을 고려 작업을 신속하게 추진하여 시민불편 해소에 만전

적정성 및 비용 부담

【휴일 근무】

- 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681, ´13.11.14.)

□휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇨ 시공사 귀책은 시공사에서 대가 지급

- 건설사업관리기술단 검토 의견

□휴일작업 사유 : 시공사 귀책으로 인한 휴일근무 임을 명기(시공사)

휴일 작업계획 변경 주요내용

근무일자	작업위치	작업내용	근 무 형 태	근무자		비 고
				시공사	감리단
‘19.12.08 (일요일) (당초)		휴 무				금회 추가 요청
‘19.12.08 (일요일) (변경)	106정거장	2스판 슬래브 철근조립 3스판 1단 벽체 거푸집	주간	공사담당 윤명근 공사담당 황재웅 안전담당 차경호	이교형
	작업구(#3) 터널	터널 내 적치된 버력 반출

개정된 근로기준법에 따라 1주 근로시간 52시간 준수 여부 : 적정

3				검토 결과 및 조치계획

작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일작업 변경승인조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무 계획을 승인코자 함.

< 건설사업관리기술자 휴일자업 변경 승인조건 >

- 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담

- 야간작업에 소요되는 건설사업관리기술자 추가 대가 제외

- 개정된 근로기준법에 따라 1주 근로시간의 한도인 52시간을 준수토록 할 것

- 야간 근무후 대체휴무에 따른 주간 감리 업무에 차질이 없도록 안전 관리 철저

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 소음․먼지․통행 불편 등 불편사항이 없도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

붙  임 : 휴일 작업계획 변경 승인 요청 공문 1부.