문서번호	시설관리과-30084
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
박지웅	정인주	천성훈		전결 12/06 代한희균
협 조

□ 상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수! □

∽ 아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다 ∽

『2019년 전기설비 유지보수 공사(장기계속단가계약)』

설계변경(2차) 검토 및 낙찰차액 사용 보고

2019. 12.

동부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『2019년 전기설비 유지보수 공사(장기계속단가계약)』

설계변경(2차) 검토 및 낙찰차액 사용 보고

『2019년 전기설비 유지보수 공사(장기계속단가계약)』관련, 현장상황에   따른 물량변경 및 신규공정 발생에 대한 설계변경 시행과 낙찰차액 사용을   아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 전기설비 유지보수 공사(장기계속단가계약)

○ 계 약 자 : ㈜세종전설  대표 원종섭

○ 계약금액 : 금111,532,280원(금일억일천일백오십삼만이천이백팔십원)

[단위 : 원]

구 분	총 차	1차수	2차수	비 고
계약금액	111,532,280	106,631,430	4,900,580

○ 공사기간 : 2019. 04. 15. ~ 2020. 03. 31.

구 분	총 차	1차수	2차수	비 고
공사기간	′19. 04. 15. ~ ′20. 03. 31.	′19. 04. 15. ~ ′19. 12. 31.	′20. 01. 01. ~ ′20. 03. 31.

○ 공사내용

- 대현산(배)아리수올림터 전동밸브반 설치공사

- 아차산(배)아리수올림터 전기 수배전반 교체공사 및 송풍기반 설치공사

- 관내 전기시설물 유지보수

□ 내역변경

○ 변경금액

[단위 : 원]

구 분	총 차	1차수	2차수	증감액
변경전	111,532,280	106,631,430	4,900,580	증)5,993,170
변경후	117,525,450	117,525,450	-

○ 주요 변경내역

1차수	- 아차산배수지 전원 인입케이블(F-CV 70㎟×4C) 설치 추가 - 아차산배수지 전도성액서스플로어(코팅 포함) 설치 추가 - 아차산배수지(소배수지 포함) 피뢰설비 보강 추가 - 응봉배수지 피뢰설비 보강 내역 삭제(※ 2020년 진행 예정) - 마장증압장 서지보호기 전용분리기 및 전원선 포설 추가 등
2차수	- PID콘트롤러, 누전차단기, 서지보호기, 신호보호기 등 내역 삭제- 아차산배수지 전기실 배관 정리, 통로유도등 및 LED투광등 추가 - 아차산소배수지 유량계 유출판넬 전원선 지중 포설 등

○ 내역변경 사유

- 현장사항(작업지시)에 따른 변경된 내역(수량, 규격 등) 반영

※ 자세한 변경내역은 설계변경내역서(총차, 1차, 2차)-2차(정산포함) 참조

○ 계약기간 변경 : 2019. 04. 12. ~ 2019. 12. 31.

구 분	총 차	1차수	2차수	비 고
변경전	′19. 04. 12. ~ ′20. 03. 31.	′19. 04. 12. ~ ′19. 12. 31.	′20. 01. 01. ~ ′20. 03. 31.
변경후	′19. 04. 12. ~ ′19. 12. 31.	′19. 04. 12. ~ ′19. 12. 31.	-	1차수 타절 조기종결

○ 기간변경 사유

- 조기예산 소진으로 1차수로 타절 준공(정산)하여 91일 조기 종결

□ 낙찰차액 사용

○ 계약금액 증가

[단위 : 원]

구 분	총 차	1차수	2차수	증감액
변경전	111,532,280	106,631,430	4,900,580	증)5,993,170
변경후	117,525,450	117,525,450	-

○ 낙찰차액 사용

[단위 : 원]

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비고
2019년 전기설비 유지보수 공사(총차)	126,896,000	111,532,280	15,363,720

○ 낙찰차액 사용 사유

- 설계변경 증가액 금5,993,170원을 본부에 추가 예산 재배정 요청하는 대신,  당해 공사의 낙찰차액을 사용하여 예산의 효율적인 사용을 기하고자 함.

□ 향후계획

○ 2019. 12. 09. : 계약금액조정 심의 의뢰

○ 2019. 12. 16. : 변경계약 의뢰

○ 2019. 12. 20. : 준공검사(1차수)

붙임  1. 설계변경내역서(총차, 1차수, 2차수)-2차(정산포함) 1부.

2. 합의서(산업안전보건관리비 사용내역 포함) 1부.  끝.