투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(2회,정산) 시행 (2019년 노후포장도로 정비공사(2구역) - 북부)

우리사업소에서 시행중인 2019년 노후포장도로 정비공사(2구역)-북부에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회,정산) 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 노후포장도로 정비공사(2구역) -북부

나. 공사기간 : 2019. 03. 15 ~ 2019. 12. 31

다. 도 급 자 : 단야공영(주)  대표  김은숙

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		3,833,000,000	3,703,708,900	감) 129,291,100
도급비	공급가액	1,149,240,000	1,075,200,000	감) 74,040,000
	부가가치세	114,924,000	107,520,000	감) 7,404,000
	계	1,264,164,000	1,182,720,000	감) 81,444,000
관 급 비		2,138,245,000	2,116,050,000	감) 22,195,000
이 전 비		430,591,000	404,938,900	감) 25,652,100

마. 설계변경사유 : 도로포장 조정 및 물량 증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리, 노후포장도로 정비공사,

시설비및부대비, 시설비

따로붙임  1. 보고서 1부.

2. 건설사업관리 검토보고서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.

5. 제비율 검증확인서 1부.

6. 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		도로보수과장	代최완		북부도로사업소장	12/06 고영준
협조자	관리단속과장	배진수
시행	도로보수과-11243	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5430	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개