문서번호	뉴미디어담당관-12830
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	홈페이지팀장	뉴미디어담당관
서은지	代조현정	12/06 이종선

「2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역」

월 간 업 무 보 고 (11월)

2019. 12.

시민소통기획관

(뉴미디어담당관)

「2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역」

월 간 업 무 보 고 (11월)

「2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역」사업의 월간

추진실적을 보고함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증

○ 추진근거

- 서울특별시 정보취약계층 정보접근성 향상을 위한 조례(’19.7.18.)

- 2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역 계획(정보시스템담당관-7520,’19.5.15.)

○ 사업기간 : 2019. 6. 19.~ 12. 18. (6개월)

○ 사업내용 : 시 및 투자출연기관 운영 웹 및 앱 정보접근성 실태조사 및 품질인증

□ 추진실적

○ 추진기간 : 2019. 11. 1. ~ 11. 30.(11월)

○ 추진기간 : 계획(88%)/실적(88%)

○ 추진내용

구분		합계	실태조사		품질인증
			웹	앱	신규	갱신
조사대상(당초)		159	81	29	8	41
조사대상(변경)		153	78	28	10	37
추진실적	금월	20	11	1	(9)	8(7)
	누계	136	77	28	1(9)	30(7)
진척율		88.9%	98.7%	100%	10%	81%

※ 품질인증은 최종 마크 취득한 사이트만 진척율에 포함, ()안의 숫자는 2차 진행 중

□ 주요실적

○ 정보접근성 실태조사 추진 (PC웹 11건, 앱 1건)

- PC 웹접근성 실태조사 결과

연번	사이트명	PC 웹접근성 실태조사
		전문가	전맹	저시력	뇌병변
1	인재개발원	*****	○	○	○
2	서울장학재단	*****	○	○	○
3	서울관광재단	*****	○	○	○
4	서울에너지공사	*****	○	○	○
5	서울시특별시120다산콜재단	*****	○	○	○
6	디지털서울	*****	○	○	○
7	법인세무조사인터넷신고시스템	*****	○	○	○
8	서울로 7017	*****	X	○	X
9	서울시사회서비스원	*****	○	○	○
10	서울시 (프랑스어)	*****	○	○	○
11	서울시 (스페인어)	*****	○	○	○

- 모바일 앱접근성 실태조사 결과

연번	모바일앱	모바일 앱 접근성 실태조사
		Android				iOS
		전문가	전맹	저시력	뇌병변	전문가	전맹	저시력	뇌병변
1	서울시 엠보팅	**	○	○	○	****	○	○	○

○ 웹 접근성 품질인증(갱신 8건)

- 미래유산(’19.11.10.), 시의회(‘19.11.18.), 정보소통광장(‘19.11.26), 보육포털(’19.12.07.), 시립미술관 (영어, 일어, 중문간체, 중문번체)(‘19.12.13.)

※ 품질인증 기준일은 한국정보화진흥원 인증서 신고일 기준

○ 웹 실태조사 보고서(11부), 앱 실태조사 보고서(1부) 부서전달

□ 12월 계획

○ 웹접근성(1건) 실태조사

연번	사이트명	심사일정	연번	앱명	심사일정
1	내친구서울	12/3-5

○ 웹접근성 신규(9건), 갱신(7건) 품질인증 2차 점검

연번	사이트명	1차 결과 통보일	연번	사이트명	1차 결과 통보일
1	내손안에서울	11/11	1	법무행정서비스	9/2
2	소셜시장실	11/11	2	우리마을가게상권분석	10/21
3	서울브랜드	11/15	3	서울한옥포털	10/21
4	복지포털	11/25	4	서울시(영어)	11/11
5	서울시엠보팅	11/25	5	서울시(일어)	11/11
6	공동주택통합정보마당	11/25	6	서울시(중국어-번체)	11/11
7	공공서비스예약	11/25	7	서울시(중국어-간체)	11/11
8	동물복지지원센터	11/28
9	서울시 소비재 정보마당	11/28

○ 실태조사 및 품질인증 결과 종합보고서 작성

○ 완료보고회 : ‘19.12.16.(월) 14시 예정

붙임 1. 월간업무보고서(11월) 1부.

2. 월간실적보고서(11월) 1부.

3. 주간업무보고서(11월) 4부.  끝.