투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2019년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 시행

1. 기전과-12171호(2019.12.6.) 설계변경 보고 관련입니다.

2. 2019년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행     하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2019.10.7. ~ 2019.12.10.

다. 계약업체 : 신흥트래픽(주) 대표 윤선희

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	17,948,700원	16,907,000원	감)1,041,700원

마. 변경사유 : 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 실제 시공물량 정산 및 보험료 정산 감액

바. 예산과목 : 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통 개선, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경도면 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/06 서승완
협조자
시행	기전과-12173	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개