문서번호	치수과-4245
결재일자	2019.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		손창열	12/06 代손창열
협조

한강공원 나들목 체계개선 종합정비 용역 추가과업 현안사항 보고

2019. 12.

한강사업본부

(치 수 과)

한강공원 나들목 체계개선 종합정비 용역 추가과업 현안사항 보고

한강공원 나들목 체계개선 종합정비 용역 추가과업에 대한 현안사항을 보고 하고자 함

□ 용역개요

○ 위    치 : 한강공원(12개 구역) 접근시설

○ 용역내용

- 나들목 신설 대상(기본계획(타당성) 및 설계검토)

- 나들목 개선 대상(기본계획(타당성) 및 기본설계)

- 한강교량 접근시설(E/V) 추가계획 검토

○ 용 역 비 : 343,363천원

○ 용역기간 : 2019.09.06 ~ 2020.09.04

□ 추진경위

○ ‘19. 5.14. : 나들목 체계개선 종합정비 추진계획 방침(본부장)

○ ‘19. 8.27. : 나들목 체계개선 계약 및 착수

○ ‘19. 6.20. : 한강시민위 기획위원회 개최

○ ‘19. 9.26. : 기본계획 (안) 최종보고

□ 현안사항 보고내용

○ 한강교량 접근시설(E/V) 개선 추가과업 기본계획 검토에 따른 설계비, 측량비, 교통조사비 증가사유 발생

○ 사업비 변경내역                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	343,363,000	400,000,000	증 56,637,000
나들목 기본계획(신설)	100,969,182	100,969,182	-
나들목 기본계획 및 설계(개선)	129,260,000	129,260,000	-
한강교량 접근시설(E/V)기본계획	-	35,691,185	증 35,691,185
측량비	33,191,000	44,168,000	증 10,977,000

수리수문 영향검토	6,414,000	6,414,000	-
교통조사비	7,901,000	12,712,000	증 4,820,000
조감도 작성비	32,425,000	32,425,000	-
성과품 작성비	1,988,000	1,988,000	-
공급가액	312,148,182	363,636,364	증 51,488,182
부가가치세	31,214,818	36,363,636	증 5,148,818

□ 조치계획

○ 상기 한강교량 접근시설(E/V) 개선 추가과업 기본계획 현안사항은 보고내용과 같이 적용하고, 추후 설계변경시 정산처리 코자 함.

- 용역비 증 56,637천원(신규공종 낙찰율 적용 86.951%)

○ 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강접근체계개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비