문서번호	설비부-19837
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		김오열	12/06 임정규
협 조

- 서울 공예박물관 조성 통신공사 -

관급자재(다수공급자계약) 계약취소 후 재구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

도시기반시설본부

설비부

- 서울 공예박물관 조성 통신공사 -

관급자재(다수공급자계약) 계약취소 후 재구매 계획

본 사업의 준공기한이 `20.09.30일까지 연기되어 해당 통신공사용 관급자재(다수공급자계약)의 납품기한도 연기하고자 하였으나, 조달청 물품 다수공급자계약 특수조건에 의거 해당 관급자재의 납품기한 연기가 불가하기에 취소 후 재구매하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고 드림. ▷계약 취소 후 재구매 대상 : 통신공사용 관급자재(다수공급자계약) ▷계약 취소 후 재구매 사유 : 조달청 물품 다수공급자계약 특수조건에 의거 납품기한 연기가 불가
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울 공예박물관 조성 통신공사

□ 공사위치 : 종로구 율곡로 3길 4(구 풍문여고 부지)

□ 공사기간 : 총차`18.05.16. ~ `20.09.30.

□ 도 급 비 : 총차 금1,006,489,000원

□ 계 약 자 : 이노뎁(주) 대표 이성진

2		관급자재(다수공급자계약) 현황

*******************************************

***********************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

3		통신공사 관급자재(다수공급자계약) 계약취소 계획

□ 당초 계약물량 취소 내용

○ 관련 근거 : 납품기한 연기 불가에 따른 계약물량 취소

- 조달청 물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 2019-17호, `19.1.30) 제26조 제2항에 의거 납품기한을 2회(회당 납품기한 연장기간은 규정상 납품기한 이내)에 한하여 연기할 수 있고,

-  같은조 제4항에 따라 수요기관의 불가피한 사정으로 납품기한을 추가 연기할 필요가 있는 경우 계약상대자와 협의하여 해당 납품요구를 취소하고 추후 납품을 희망하는 때에 새로운 납품요구를 지시할 수 있음.

*******

*************************************************************************************************************************************************

***********

*******************************************************

*************************

***********************************

****************************************************

*****************************************

****************************

****************************

5		향 후 계 획

□ 2020.09.30. : 관급자재 납품 및 설치완료

따로붙임 : 1. 통신공사 관급자재(다수공급자계약) 계약 취소내용 1부.

2. 합의각서(계약취소 후 재구매) 1부. 끝.