문서번호	기반시설과-4064
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이건용		代정창수	12/09 전영주
협조

설계변경 시행 보고

[가양대교 남단, 올림픽대교 남단 승강기 설치 전기공사]

2019. 12.

한강사업본부

(기반시설과)

설계변경 시행 보고

〈가양대교 남단, 올림픽대교 남단 승강기 설치 전기공사〉

「가양대교 남단, 올림픽대교 남단 승강기 설치 전기공사」시행 중 현장 여건으로 인한 계약 내역이 변경되어, 이에 설계 변경을 실시하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 가양대교 남단, 올림픽대교 남단 승강기 설치 전기공사

○ 공사기간: 2019. 09. 02. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사규모: 승강기 전력공사 및 조명 설비공사

○ 도 급 액: 금175,934,730원

○ 도 급 자: 주식회사 남성전력(대표자: 추종열)

□ 설계 변경 현황

○ 설계 변경 내용

- 계약 공종별 수량 변경 및 보험료 정산

○ 설계 변경

구 분		당 초	변 경	증, 감
총 공 사 비		175,934,730	166,755,000	-9,179,730
도급액	공 급 가 액	159,940,664	151,595,455	-8,345,209
	부 가 세	15,994,066	15,159,545	-834,521
	도 급 액	175,934,730	166,755,000	-9,179,730

□ 조치 계획

○ 상기와 같은 내용으로 설계변경을 시행하고 공사 추진에 만전을       기하고자 함

붙임 1. 설계변경 내역서 1부

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.