문서번호	설비부-20056
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/09 임정규

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 공기연장에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 노원구 월계1교 ~ 창동교

❍ 공사규모 : (1공구) 도로확장 4→6차로, L=1,4km(지하차도 402m)

(2공구) 도로확장 4→6차로, L=3.2km(지하차도 2.9km)

❍ 주요설비 : 비상전화, CCTV, 도로전광표지판, 영상검지기, 라디오재방송

❍ 공사기간 : 2008.12.29 ~ 2019.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,347백만원

❍ 감 리 단 : (1공구) ㈜도화엔지니어링, (2공구) ㈜이산

❍ 시 공 사 : ㈜퓨젼아이앤씨

2		관련근거

관련근거

❍ 공사기한 연기원 제출 보고(동부2감-19-493호, 2019.12.02.)

3		검토내용

❍ 공사기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	`08.12.24.~`19.12.31.	`08.12.24.~`20.12.31.	365일 연장
5 차	`19.05.15.~`19.12.31.	`19.05.15.~`20.12.31.	365일 연장

❍ 연기 사유

- 선행공종인 토목공사의 준공기한 연기(`19.12.31.→`21.10.31.)에 따라 후속공종인 통신공사의 준공기한 연기가 불가피함.

- 토목공사 예정 공정(현재 공정률 : 77%)

· 지하차도 구조물 : 2020. 05.

· 풍도슬래브 : 2020. 04.

· 벽체 도장 및 PCMC 포장 : 2020. 11.

❍ 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

4		검토의견

❍ 건설사업관리기술자 의견

- 선행공종인 토목 사업계획변경 등으로 인한 공사 지연에 따라 후속공종인 통신공사 공정 추진시기가 지연되는 실정으로 공사기한을 연기 조치함이 타당한 것으로 사료됨.

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술단이 제출한 통신공사 준공기한 연기에 대한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 준공기한 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙 임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.