문서번호	기전설비과-11997
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		조성태	12/09 代서한호
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

[우면산가압장 급수체계 개선 정보통신공사]

설계변경 검토계획 보고

2019. 12.

생산부

(기전설비과)

우면산가압장 급수체계 개선 정보통신공사

설계변경 검토계획 보고

물량변경 및 제경비 정산에 따른 사항을 검토하고 그 결과를 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 우면산가압장 급수체계 개선 정보통신공사

○ 공사기간: 2018. 4. 27.〜2020. 5. 30.

○ 계 약 자: 두레에스텍 대표 유의근

○ 계약금액: 총차분 27,973,170원(2차분:22,530,000원)

○ 공사내용

-CCTV공사: CCTV 배관·배선 등

-정보통신공사: 정보통신망(전용회선, 유선방송 등) 배관·배선 등

************************

□ 설계변경 검토내용

○ 설계변경 사유

- KT통신맨홀 위치 변경에 따른 수량 조정

- 흡수정 상부 CCTV#2 케이블 경로 및 규격 변경

- 가압장 인입구 맨홀에서 사무실 MDF까지 매입배관 미반영분 추가

- 보험료 및 산업안전보건관리비 등 증빙자료 미제출부분의 금액 반영

○ 수량 증감 현황

- 총차분 1회

공 종	규 격	단위	당 초	변경(안)	증·감
ELP전선관	65mm	m	750	540	(감) 210
관로구방수장치	ø65	개	36	18	(감) 18
배관용구멍뚫기	두께15cm이하	개소	36	18	(감) 18
핸드홀	900*450*700	SET	3	-	(감) 3
경질비닐PVC전선관	HI 28mm	m	0	90	(증) 90
ELP전선관	30mm	m	282	412	(증) 130
UTP케이블	Cat.6, 4Pr	m	297	181	(감) 116
전력케이블	F-CV 2.5㎟/2C	m	297	362	(증) 65
접지케이블	F-GV 2.5㎟	m	297	362	(증) 65
광케이블	S/M 4C	m	-	181	(증) 181
광분배함	4코어, 미니형	개	-	1	(증) 1
광분배함	4코어, 랙형	개	-	1	(증) 1
광수신모듈	SFP-LX	개	-	2	(증) 2
광컨버터	SFC2000-SFP	개	-	1	(증) 1
광접속,시험	4 코어	개소	-	4	(증) 4

- 2차분 1회

공 종	규 격	단위	당 초	변경(안)	증·감
ELP전선관	65mm	m	501	540	(증) 39
관로구방수장치	ø65	개	36	18	(감) 18
배관용구멍뚫기	두께15cm이하	개소	36	18	(감) 18
경질비닐PVC전선관	HI 28mm	m	-	90	(증) 90
ELP전선관	30mm	m	282	368	(증) 86
UTP케이블	Cat.6, 4Pr	m	297	181	(감) 116
전력케이블	F-CV 2.5㎟/2C	m	297	362	(증) 65
접지케이블	F-GV 2.5㎟	m	297	362	(증) 65

○ 공사비 증감 대비

- 총차분 1회

공 종	당 초	변경(안)	증·감
1 .정보통신설비공사	10,513,664원	7,163,744원	(감)3,349,920원
2. CCTV설비공사	9,351,289	11,520,000원	(증)2,168,711원
순공사비 계	19,864,953원	18,683,744원	(감)1,181,209원
제 경 비	8,108,217원	7,840,256원	(감) 267,961원
도 급 금 액	27,973,170원	26,524,000원	(감)1,449,170원

- 2차분 1회

공 종	당 초	변경(안)	증·감
1. 정보통신설비공사	6,592,085원	7,163,744원	(증)571,659원
2. CCTV설비공사	9,351,289원	9,505,734원	(증)154,445원
순공사비 계	15,943,374원	16,669,478원	(증)726,104원
제 경 비	6,586,626원	5,860,522원	(감)762,104원
도 급 금 액	22,530,000원	22,530,000원

□ 검토계획(설계변경심의 개최)

○ 시    기: 2019. 12. 10.(화)

○ 장    소: 생산부 회의실

○ 내    용: 자재 규격 및 수량의 적정성, 제경비 산출 및 적용 타당성

○ 위원구성

- 위원장: 기전설비과장 조성태

- 위  원: 공업주사 김영준, 공업주사 김형집, 공업주사보 임은비, 공업서기 이기상

□ 향후계획

○ 변경계약 체결 후 2차분 준공

○ 정보통신공사 3차분 계약의뢰

붙임  1. 실정보고 검토결과 1부

2. 감리단 설계변경 요청 1부

3. 변경내역서(총차, 금차) 2부.  끝.