투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	(주)트래픽스 대표
(경유)
제목	작업지시 8차 변경 등[(2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」와 관련하여 아래와 같이 변경 작업     지시(8차) 하오니, 기한내 완료 후 완료보고서를 제출하여 주시고 작업장 안전관리에     철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 지시번호 : 2019-8

나. 작업기간 : 2019. 11. 4. ~ 2019. 12. 10.

다. 제출기한 : 2019. 12. 10일 까지

라. 변경내용 : 물량 변경(붙임의 작업지시서 연번16, 47∼49번 참조)

마. 변경사유

1) 굴착(지주철거) 지연으로 인한 굴착신고(허가) 취소

2) 민원 등으로 인한 긴급 작업분 반영

3. 감리사께서는 설계변경(정산)서를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 작업지시서(변경) 1부.

2. 공사관계자 연락처 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	이성도		기전과장	전결 12/09 서승완
협조자
시행	기전과-12245	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)