- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산)시행(2019년 도로굴착복구공사(연간단가))

우리 부서에서 시행 중인「2019년 도로굴착복구공사(연간단가)」에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 도로굴착복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2019. 2. 25. ∼ 2019. 12. 31.

다. 계약금액 : 629,020,000원

라. 계 약 자 : 돈지종합건설(주)  대표 곽동철

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총공사비	1,102,411,000	1,282,747,180	증	180,336,180
도 급 비	629,020,000	851,367,000	증	222,347,000
관 급 비	328,301,350	295,365,180	감	32,936,170
이 전 비	145,089,650	136,015,000	감	9,074,650

바. 설계변경사유 : 관리청 복구물량 변동에 따른 시공물량 증·감

사. 예산과목 : 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비및부대비, 시설비(도로굴착복구기금)

붙 임.  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 일상감사 및 계약심사 결과 각 1부. 끝.

주무관							장은경			도로굴착팀장					황인수					도로시설과장					신대식				생활도시친화국장						12/09 정택근
협조자				주무관						한희주					계약팀장							최영순					재무과장							박수돈
시행			도로시설과-13831									(	2019.12.9					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6123						/전송			02-3396-8839					/	nomood@junggu.seoul.kr												/	대시민공개