투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(1차) 계약 및 준공기한(총차) 연장 의뢰 [탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사]

1. 설비부-19993(2019.12.09.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인「탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사」에 대한 설계변경(1차 4회) 계약 및 준공기한(총차) 연장을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명:「탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사」

나. *********************************

다. 도 급 사: ㈜부경일레콤 외 2개사

라. 설계변경 사유 : 현장여건 변경에 따른 설계변경

마. 준공기한 연장 사유 : 선행공정 지연에 따른 준공기한 연장

바. 설계변경 및 준공기한 연장 내용

구 분	계 약 금 액(원)			계 약 기 간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
***	*************	*************	****	************ ***********	************ ***********
***	***********	***********	*************	************ ***********	****

붙임  1. 검토 보고서 및 감리단 공문 1부.

2. 변경내역서 및 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	12/09 임정규
협조자
시행	설비부-20047	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)