투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	“신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사” 관급자재 납기연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 설비부-19969 호(2019. 12. 9.) 관련하여 ‘신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사‘       관급자재 납기연기에 따른 변경계약을 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기  바랍니다.

가. 계 약 명 :  신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사_제어시스템

나. 계 약 자 :  ㈜테크윈시스템 대표 김래진

다. 변경계약 의뢰 내용

계약번호 (구매관리번호)	계약기간		비고
	변경 전	변경 후
12172197401 (12172090000)	‘17.12.29. ~ 19.12.15	‘17.12.29. ~ 20. 2.15.	증62일

라. 계약변경 사유 : 공사 공기연장에 따른 관급자재 납기 연장

마. 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

바. 지체상금 부과여부 :  미부과

붙임 : 1. 설계변경 시행 보고서 1부.

2. 합의각서 각1부.  끝

	설비부장
주무관	손영화		환경설비과장	김오열		설비부장	12/09 임정규
협조자	재무예산과장	代이강준
시행	설비부-19995	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)