＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(상계1배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역)

1. 우리 본부에서 추진 중인 아래 용역에 대하여 설계변경 시행에 따른 변경계약

의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 상계1배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

나. 용역업체 : ㈜대한콘설탄트  대표 이영민

다. 계약금액 : 138,410,000원

라. 계약일자 : 2018.4.10.

마. 용역기간 : 2018.4.13. ~ 2019.12.31.

바. 설계변경 사유 : 도시계획시설결정 미시행 및 보험료 실정산

사. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비

아. 설계변경 내역

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증·감
도급비 （VAT）	138,410,000원	131,197,000원	감7,213,000원

붙임. 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	계획설계과장
주무관	조규환		계획설계과장	12/09 代권오정
협조자
시행	계획설계과-11480	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1417	/전송	02-3146-1429	/		/	부분공개(5)