＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(2019년 자동제어설비 유지관리 용역)

1. 시설관리과-23904(2019.12.04.)호 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인『2019년 자동제어설비 유지관리 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰하고자 합니다.

가. 건     명 : 2019년 자동제어설비 유지관리 용역

나. 계약상대자 : **************

다. 용역기간 : 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.

라. 계약금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증/감	비 고
도 급 비		43,829,450	43,829,450	0
1차수	‘19년 계약금액	38,648,720	33,560,490	(감)5,088,230
2차수	‘20년 계약금액	5,180,730	10,268,960	(증)5,088,230

마. 설계변경사유 : 물량변경에 의한 설계변경

바. 예산과목 : 상수도영업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경심의개최 결과보고 1부.

3. 심의결과서 1부.

4. 변경내역서 1부.

5. 설계변경 사유서 1부.

6. 합의서 1부.

7. 설계변경 시행문 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	이한수		기전팀장	정진호		시설관리과장	12/09 이경희
협조자
시행	시설관리과-24259	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송		/		/	부분공개(5)