문서번호	시설과-12458
결재일자	2019.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김형식		代최이영	12/10 代이용구
협조
	주무관		김기봉

「낙산배수지 건설공사」

송수관 익일 재굴착 토공 누락분 반영 검토 보고

2019. 12.

상수도사업본부

시설안전부(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

송수관 익일 재굴착 토공 누락분 반영 검토 보고

송수관 부설시 전일 부설된 관을 연결 배관하기 위한 재굴착 토공이 설계과정에서 누락되어 이에 대한 물량 반영을 검토하여 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥(기존 3,300 ㎥ ⇒ 5,600㎥)
송배수관부설 400㎜, 연장 597m

❍ 기    간 : ’17. 12. 14.~’20. 05. 30.(총차)

’19. 01. 01.~’20. 12. 31.(3차수 진행 중)

❍ 도 급 비 : 2,095,899백만원(3차:971,025천원)

❍ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-326호(’19. 12. 02.)

- 송수관 익일 재굴착 토공 누락분 반영 실정보고 제출

❍ 송수관 부설 계속공사로 인해 배관 연결부에 대한 익일 재굴착과 되메우기 등의 토공량이 실시설계 시 누락

- 작업일보 기준 익일 재굴착 일수 : 총 33일

- 재굴착 수량 : 총 277㎥

❍ 상수도공사 설계 일반지침서에 따르면 관로공사 시 계속공사로 인하여 익일 재 굴착되는 부분에 대하여는 가산토록 규정

- 상,하 평균길이 250mm이하 2m, 300~600mm이하 3m 적용

- 가산 적용된 토량은 순수한 기계 터파기량에 반영

※ 공사비 증·감 현황(※ 신규단가는 낙찰률 적용)

(단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						3,212,000		3,212,000
1.직접공사비						1,930,413		1,930,413
주간공사
중복터파기 (토사)	백호0.4	㎥			277	425,195	277	425,195
중복되메우기 (토사)	백호0.4+ 콤팩트	㎥			277	1,505,218	277	1,505,218
2. 제잡비						1,281,587		1,281,587

건설사업관리자 종합의견

❍ 설계도서 오류로 인한 송수관 익일 재굴착 토공 누락에 대해 향후 설계변경 시 반영함이 타당함.(※ 기계 시공으로 반영)

검토의견(공사관리관)

❍ 송수관 익일 재굴착 토공 누락은 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우로 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

- 공사설계 변경사항은 계약금액 조정사유에 해당

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.