문서번호	토목과-15370
결재일자	2019.12.10.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
조장호		조영두		오석관		12/10 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

『2019년 도로시설물 유지보수 공사(단가계약)』

설계변경(제3회-최종) 시행 보고

2019. 12.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( 1,551,980천원 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『2019년 도로시설물 유지보수 공사(단가계약)』

설계변경(제3회-최종) 시행 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2019년 도로시설물 유지보수 공사(단가계약)

○ 공사기간: 2019. 3. 5. ∼ 2019. 12. 31.

○ 도 급 자:(주)금성아트 대표 장윤현

○ 공 사 비: 금1,675,943,000원

(도급비 1,102,285천원, 관급비 514,020천원, 이전비 59,638천원)

□ 설계변경 사유

○ 신규 및 타부서 의뢰 사업 병행 시행에 따른 신규공종 및 공종별 물량 증가 발생

- 도로 및 도로시설물 사업 추진계획(토목과-1041호, 2019.1.28.)

□ 살곶이다리(신교) 보수보강 공사

- 낙찰차액 사용계획 보고(토목과-13971, 2019.11.15.)

- 마장축산물시장 일대 도시재생활성화 사업 가로환경 개선사업 추진계획(토목과-12236호, 2019.10.14.)

- 2019 도로교통소통 개선사업 도선사거리 앞 좌회전 시행 계획(교통행정과-68448호, 2019.9.6.)

- 안전한 통학로 조성을 위한 옥정중 고사목 제거 및 정비 계획(교육지원과-8578, 2019.8.7.)

- 1동 1골목 도로정비사업 추진계획(토목과-5964, 2019.5.28.)

- 소방시설 주변 주정차 금지구간 노면표시 설치 협조요청(교통지도과-29093, 2019.10.31.)

- 송원초 통학로 정비 2단계 안전통학로 리빙랩 주민제안 처리계획(토목과-14322, 2019.11.21.)

○ 현장 여건에 따른 공종별 물량 증·감 발생

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 공종별 변경된 사항에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함

○ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총공사비	1,675,943,000	2,487,098,000	증	811,155,000
도 급 비	1,102,285,000	1,865,820,000	증	763,535,000
관 급 비	514,020,000	579,230,600	증	65,210,600
이 전 비	59,638,000	42,047,400	감	17,590,600

※ 예산현황 붙임 참조

붙임  1. 변경설계서 1부.
2. 예산현황 1부.
3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 일상감사의견서 1부.
5. 관련공문 8부.  끝.