문서번호	설비부-20245
결재일자	2019.12.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/10 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

2차공사 계약금액 조정 검토보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

공사(2차) 계약금액 조정 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』공사(2차)에 반영된 안전관리비 및 보험료 오기사항이 있어 계약금액 정정하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 소형2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  시 공 사 : **************************

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링 외 1개사

□  공 정 률 : 28%(매입배관 시공 진행)

2		관련근거

□ 남산예장 제2019-571호(`19.12.10) : 건설사업관리단 설계변경 검토보고

3		설계변경 내용(2차공사)

□  2차공사 계약금액 조정

○ 변경사유

· 공종 집계표 내역 합산 오기 정정

· 원가계산서 상 안전관리비 이중계상 정정 및 보험료 정산

○ 금액변경 내용(2차공사)

공종	공사금액(단위:원))
	변경 전	변경 후	증감액
전력인입	*******	*******	-
수변전설비	*******	*******	-
전력간선	*	*	-
동력공사	*******	*******	-
냉난방설비	*********	*********	*********
전열공사	*********	*********	-
전등공사	**********	**********	-
케이블트레이공사	**********	**********	-
접지공사	**********	**********	-
전력 및 조명제어	*******	*******	-
주차관제	*******	*******	-
옥외가로등	**********	**********	-
직접공사비	***********	***********	*********
간접공사비 (안전관리비,보험료 등)	**********	**********	************
물가변동	*********	*********	-
도급금액	***********	***********	************

4		보고자 의견

□ 2차공사 공종별 집계표 내역합산, 안전관리비 계상시 오기가 발견          되어 위 내용과 같이 계약금액 조정함이 적정하므로 계약부서에 변경        계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.