투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(2019년 포장도로 긴급복구공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 2019년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에 대한 설계변경(정산, 2회)에 따른 변경계약을 아래와 같이 의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-강서

나. 공사기간 : 2019. 3. 27. ~ 2019. 12. 13.

다. 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 232.16a, 소파포장복구 46.97a,

긴급소파보수 출동/대기 2,259hr 등

라. 도 급 자 : 향일건설(주) 정윤상 외1

마. 변경사유 : 시공물량 변경 및 제경비 정산 처리

바. 변경내역                                                   (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	1,253,422,637	1,694,105,455	증)440,682,818
	부가세	125,342,263	169,410,545	증) 44,068,282
	계	1,378,764,900	1,863,516,000	증)484,751,100

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사,

시설비 및 부대비, 시설비 [금2,025,677,000원]

- 도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 도로사업소 사무환경개선, 일반운영비, 공공운영비 [금291,666,000원]

붙임  1. 2019년 포장도로 긴급복구공사 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 검토의견서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 계약금액 검증확인서  1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1 부.

6. 합의각서 1부.

7. 변경계약 시행 방침 1 부.  끝.

	도로보수과장
주무관	정회곤		도로보수과장	12/10 류태용
협조자
시행	도로보수과-12008	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/	jhgon1999@seoul.go.kr	/	부분공개(5)