투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「응봉근린공원 환경개선사업」설계변경 시행 및 계약변경 의뢰

1. 시설과-(2019.12.9.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『응봉근린공원 환경개선공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 응봉근린공원 환경개선공사

나. 도 급 액 : 금333,091,000원

다. 공사기간 : 2019. 10. 22 ~ 2020. 01. 19

라. 도 급 자 : 주계약자 : 민안종합건설㈜ 대표 이미란

부계약자 : ㈜나람조경개발 대표 이기자

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	302,810,637	330,096,364	27,285,727
	부가세	30,281,063	33,009,636	2,728,573
	도급비계	333,091,700	363,106,000	30,014,300

바. 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지 정책개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비(도시개발특별회계),, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

사. 기간연장

- 당초 : 2019. 10. 22 ~ 2020. 01. 19

- 변경 : 2019. 10. 22 ~ 2020. 04. 15

- 사유 : 동절기 하자 및 근로자 안전 사고 예방을 위한 기한 연장(현장 실정사항 반영)

붙  임 : 1. 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	하종식		시설과장	12/10 진병규
협조자	재무팀장	곽선아
시행	시설과-3107	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)