“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	한강교량 안전난간 확대 설치 실시설계 용역(1차) 준공기한 연기요청

1. 교량안전과-20545호(2019.12.9.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인 “한강교량 안전난간 확대 설치 실시설계 용역(1차)”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

용 역 명	도 급 자	용역기간
		당 초	변 경
한강교량 안전난간 확대 설치 실시설계 용역(1차)	****************	‘19.9.6.∼‘19.12.31.	‘19.9.6.∼‘20.4.8.

나. 지체상금 : 미부과

다. 연기사유 : 세부 사유 별도 연기의뢰서 붙임

라. 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 한강교량 자살방지 난간 확대 설치 실시설계, 시설비

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
★주무관	이노진		교량기획팀장	박동욱		교량안전과장	12/10 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-20652	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1949	/전송	02-2133-1429	/	no2001@seoul.go.kr	/	부분공개(5)