＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 (2차)연기 시행(건설사업관리용역)

1. 정수시설과-7968(2019.12.10.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 ‘광암정수센터 정수지 신축이음 및 하자 보수공사 건설사업관리용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 광암정수센터 정수지 신축이음 및 하자 보수공사 건설사업관리

2) 계 약 자 : **************

3) 계약금액 : ******************************

4) 계 약 일 : 2019년 06월 13일

5) 준공기한 : 2019년 12월 13일

나. 준공기한 연기

1) 변경 준공기한 : 2019년 12월 24일

2) 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(광암아리수정수센터)

3) 지체상금 부과여부 : 미부과

4) 연기사유 : ******************************************

붙  임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 방침서 1부.  끝.

주무관	신중선		정수시설과장	12/10 남효돈
협조자	주무관	박은경
시행	정수시설과-7987	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5382	/전송	02-3146-5309	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	부분공개(5)